Ⅳ. 지역적 특징 등을 감안한

특수한 재정운용상황에 대한공시

① 강진 오감누리타운 조성

② 강진 환경산업단지 조성사업

③ 전남 교통연수원 이전 건립

④ 한국민화미술관 건립

⑤ 한.중.일 도자정원(한옥청자판매장)조성사업

[특수공시]

특수공시 대상사업 목록

(단위 : 억원)

연번	사 업 명	사 업 개 요	총사업비	비 고
1	강진 오감누리타운조성	- 기 간 : 2011 ~ 2015 - 위 치 : 강진읍 동성리 일원 - 사업내용 : 커뮤니티센터, 먹거리 장터, 한정식체험과, 주차장, 지중화 등	163 (국 80, 군 83)
2	강진 환경산업단지 조성사업	- 기 간 : 2008 ~ 2015 - 위 치 : 성전면 송학리, 명산리 일원 - 사업량 : 657,353㎡	532 (전남개발공사 431, 군 101)
3	전남 교통연수원 이전건립	- 기 간 : 2014 ~ 2015 - 위 치 : 성전면 월남리 693-1일원 - 사업내용 : 교육시설, 숙박시설, 사무실, 교통랜드	83 (연수원 70, 군 13)
4	한국민화미술관 건립	- 기 간 : 2012 ~ 2014 - 위 치 : 대구면 사당리 34-1외2필지 - 사업내용 : 부지 2,441㎡, 연면적 1,859㎡ · 1층 : 상설시설, 수장고, 체험장 등 · 2층 : 기획전시실, 특별전시실, 사무실 등	62 (국24, 특5 도2, 군31))
5	한.중.일 도자정원 조성사업	- 기 간 : 2013 ~ 2014 - 위 치 : 대구면 사당리 324-1 - 사업내용 : 한옥 청자판매장 1동 / 479.4㎡	17 (국 10 군 7)

강진오감누리타운 조성

	◁ 사업개요 ▷
❍ 위 치 : 강진군 강진읍 동성로 9 일원 / 7,684㎡ ❍ 사업기간 : ‘11. 2. ~ ‘15. 1. (4개년) ❍ 사 업 비 : 163억원(광특 80 / 군비 83) ▷ 읍소재지종합정비 10,000 ▷ 읍시장주차장설치 1,667 ▷군비 4,657백만원 ❍ 사업내용 : 커뮤니티센터, 먹거리장터, 한정식체험관, 주차장, 지중화 등

▣ 추진배경

❍ 지역경제 활성화를 견인할 수 있는 문화관광형 시장 타운 조성

❍ 전선지중화 사업을 통해 읍상권 중심 지역인 중앙로 경관개선

▣ 사업진행 현황

❍ 전선지중화사업(사랑병원 ~ 영랑생가) : ‘12.  7. (620m / 1,392백만 원)

❍ 기본계획 승인(전라남도) : ‘13. 3.(용역비 110백만 원  / 사전재해 34백만 원)

❍ 콘텐츠 개발용역 : ‘13. 7.(18백만 원)

❍ 편입토지 보상협의 완료 : ‘13. 10. ( 25필지 6,513㎡ / 5,557백만 원)

❍ 실시설계용역 완료 : ‘14. 2.(142백만 원)

❍ 사업발주 : ‘14. 4. (착공 : ’14. 6.)

❍ 건물 및 지장물 철거 : ‘13. 12. ~’14. 9.(추진중)

❍ 운영조례 제정, 시설별 활용계획, 입주공모 : ’14. 10. 한

❍ 전선지중화사업(강진버스터미널 ~ 동광당~강진경찰서) : ‘14. 10. ~ ‘15. 1.

❍ 오감누리타운 준공 : ‘15. 1. 예정

▣ 기대효과

❍ 다양한 문화관광 콘텐츠를 통해 방문객들에게 오감만족 기회 제공

❍ 머물고 가는 방문․관광객의 유치 확대로 지역경제 활성화 기여

□ 위 치 도

사 업 부 지

□ 조 감 도

강진 환경산업단지 조성사업

	◁ 사업개요 ▷
❍ 위 치 : 강진군 성전면 송학리, 명산리 일원 ❍ 사업기간 : 2008. ~ 2015. 6. ❍ 사 업 비 : 532억원(전남개발공사 431, 강진군 101) ❍ 개발방식 : 공영개발(강진군,전남개발공공사) ❍ 유치업종 : 환경산업, 조선기자재, 신재생에너지

▣ 추진배경

❍ 대통령 공약사업인 환경산업 멀티클러스터 활용 기업유치 추진

❍ 환경 산업단지 조성 및 유치로 중남부권의 핵심도시 성장·발전

▣ 사업진행 현황

❍ 일반산업단지 실시계획 승인 및 고시 : 2009. 5. 20. / 전남도 제2009-241호

❍ 업무협약서 체결 : 2010. 4. 12. / 전라남도, 강진군, 전남개발공사

❍ 사업타당성 조사 : 2010. 2. ~ 6. / 전남개발공사

❍ 공동이행협약 체결 : 2010. 8. 10. / 전남개발공사, 강진군

❍ 산업단지명칭 변경 고시: 2011. 10. 5. / 전남도 2011-333호

- 강진성전일반산업단지 → 강진환경산업단지

❍ 편입용지 보상 : 2011. 4. ~ 2013. 1.

❍ 공사착공 : 2012. 1. 3. (2014. 7.현재 공정율 70%)

▣ 기대효과

❍ 산업단지 조성 및 기업유치로 지역경제 활성화의 핵심 기능

❍ 산업단지 입주기업의 고용창출을 통한 주민소득 증대

□ 위 치 도

□ 조 감 도

전남 교통연수원 이전 건립

	◁ 사업개요 ▷
❍ 위 치 : 강진군 성전면 월남리 693-1 일원 ❍ 사업기간 : 2014. 5. ~ 2015. 9. ❍ 사 업 비 : 83억원(연수원 70, 군비 13) ❍ 사업규모 : 부지 19,663㎡/건축 2,373㎡(연수원, 교통랜드) ❍ 주요시설 : 교육시설, 숙박시설, 사무실, 교통랜드

▣ 추진배경

❍ 전남 교통연수원과 강진화물공영차고지를 연계하여 호남교통메카로 정착

❍ 운수종사자 관내 유입 증가에 따른 지역발전 원동력 제고

▣ 사업진행 현황

❍ 전남 교통연수원 진입도로 개설공사 완료

- 위  치: 월남리 1264-8(2,324㎡) / 사업비: 470백만 원

- 사업량: L=84m, B=7m, 주차장 등 / 사업기간: 2013. 11. ~ 2014. 6.

❍ 전남 교통연수원(교육장 및 숙소 등) 및 어린이 교통랜드 조성공사 추진

- 폐 건축물 철거, 폐기물(지정, 일반)처리용역: 2014. 6. ~ 7.

- 전남 교통연수원 조성공사 착공: 2014. 8.

- 전남 교통연수원 조성공사 준공 및 개원: 2015. 9.

▣ 기대효과

❍ 운수종사자 및 교육생 유입으로 지역경제 활성화에 기여

❍ 전남 운수종사자 및 교육생에게 우리군 관광홍보 효과 기대

□ 위 치 도

진입도로

연수원부지

□ 조 감 도

한국민화미술관 건립

사업대상지: 250ha

사업대상지: 250ha

사업대상지: 250ha

	◁ 사업개요 ▷
❍ 위 치 : 강진군 대구면 사당리 34-1번지 외 2필지 ❍ 사업기간 : 2012. 12. ~ 2014. 12. ❍ 사 업 비 : 6,284백만 원(광특2,447, 특교500, 도비200, 군비3,137) ❍ 사업내용 : 부지 2,441㎡, 연면적 1,859㎡(지하 1층, 지상 2층) - 1층 : 상설전시실, 수장고, 체험장 등 / 지하 : 기계실 등 - 2층 : 기획전시실, 특별전시실(춘화), 사무실 등

▣ 추진배경

❍ 강진을 대표하는 청자와 민화를 연계한 창조적인 문화콘텐츠 개발

❍ 다양한 문화체험 공간을 마련하여 관광객 유치 및 지역경제 활성화

▣ 사업진행 현황

❍ 기본 및 실시설계 : ‘12. 12. ~ ’13. 7./ 건축 및 전시

❍ 전라남도 공공디자인위원회 심의 : ‘13. 5. ~ 6.

❍ 관련 인허가(관광지 조성계획 및 지구단위계획 변경) : ‘13. 6.

❍ 부지정리 및 공사착공 : ‘14. 01. ~ ‘14. 12.

❍ 전시물 제작 설치 : ‘14. 08. ~ ‘15. 02.

❍ 광장조성 및 조경공사 : ‘14. 10. ~ ‘14. 12.

❍ 운영 및 개관 준비 : ‘15. 1. ~ ’15. 3. (3개월)

▣ 기대효과

❍ 전통성과 독창성을 겸비한 문화 프로그램을 제공하여 군민의 삶의 질 향상과 매년 개최되는 청자축제의 기반시설로 활용

□ 위 치 도

한국민화미술관

도예문화원

□ 조 감 도

한·중·일도자정원(한옥청자판매장) 조성사업

	◁ 사업개요 ▷
❍ 위 치 : 강진군 대구면 사당리 324-1번지 일원 ❍ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2014. 11. ❍ 사 업 비 : 1,667백만 원(국비 1,000, 군비 667) ❍ 사업내용 : 한옥 청자판매장 신축 1동 / 479.4㎡

▣ 추진배경

❍ 세계도자중심으로서의 3국(한·중·일)의 도자문화에 대한 이해뿐만 아니라 청자박물관, 청자축제 등 청자산업인프라와 연계하여  관광활성화를 위한 관광자원으로 활용

❍ 청자촌과 조화된 한옥 청자공동판매장 신축으로 청자촌의 새로운 랜드마크로 조성

▣ 사업진행 현황

❍ 기본 및 실시설계 : ‘14. 1. ~ ’14. 3.

❍ 부지정리 및 공사착공 : ‘14. 5.

❍ 건축공사 추진 및 준공 : ‘14. 5. ~ ’14. 11.

❍ 개관 준비 : ‘14. 11. ~ ’14. 12. (1개월)

❍ 개관 : ‘15. 1.

▣ 기대효과

❍ 보다 멋스런 한옥 청자공동판매장 신축으로 인한 새로운 관광자원 활용으로 관광객 증대를 통한 청자판매 활성화에 기여

□ 위 치 도

□ 조 감 도