9

주요 투자사업 추진현황

9-1. 투자심사 대상사업

우리 강진군에서 ‘15년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
가우도 향기의 섬 조성사업	3,800	-	-	3,800	2018.12.	2015	10%
다산테마공원 조성사업	3,500	-	-	3,500	2018.12.	2015	0%
도시가스 공급	5,771	-	1,592	4,179	2020.12.	2015	38%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘15년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

가우도 향기의 섬 조성사업

담당자

주무관 전혁(☎430-3343)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태계의 보고(寶庫)인 해안과 후박나무 군락지 등 자연환경을 최대한        보존하면서 강진만(灣)과 더불어 관광상품으로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ～ 2018년 12월(3년)

○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도 일원

○ 규 모 : 320,745㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	3,800	-	400	1,600	1,800
국 비	1,900	-	200	800	900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,900	-	200	800	900
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-		-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 : ‘16. 1. ~ 7.

○ 사업착공(녹지공간 조성) : ‘16. 8.

□ 향후계획

○ 사업준공(‘16년사업) : ‘16. 11.

○ 사업추진 및 준공(‘17, ’18사업) : ‘18. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

- 사업별로 별지 작성

사업명

다산테마공원 조성사업

담당자

주무관 전혁(☎430-3343)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다산의 청렴과 애민사상을 체험과 연계할 수 있는 다산네트워크 구축으로       전국 청렴교육 1번지로 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 1월 ～ 2018년 12월(3년)

○ 위 치 : 강진군 도암면 만덕리 일원

○ 규 모 : 8,000㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘16연도	‘17연도	‘18연도 이후
계	3,500	-	333	1,667	1,500
국 비	2,100	-	200	1,000	900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,400	-	133	667	600
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-		-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

○ 전남도 공무원 교육원 (다산수련원 인근)이전에 따른 사업보류

※ 사업계획 변경예정(위치 및 사업내용)

□ 향후계획

○ 사업계획변경 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

도시가스 공급(일반회계)

담당자

공업6급 김성기(☎430-3352)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경적인 도시가스(LNG) 공급으로 대기환경을 개선하고 안전한 가스를

공급을 통한 주민 편의증대

○ 친환경에너지를 보급함으로써 인구유입을 통한 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 7.∼ 2020. 12.(5년 6개월)

○ 위 치 : 강진군 강진읍, 군동면 호계리 일원

○ 규 모 : 도시가스 공급관 17.682㎾(중압 1,056 저압 16.626)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,771백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘17연도 이후
계	5,771	0	1,592	625	3,554
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	400	0	150	0	250
시군구비	400	0	400	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	4,401	0	1,042	565	2,794
기 타	570	0	0	60	510

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 38%)

○ 도시가스 중앙로 공급개시 : 2015. 1. 18.

○ 공급관 4.6㎞ 설치 300가구 도시가스 공급

□ 향후계획

○ 후레쉬빌, 건우, 한전 등 아파트 공급계약 내부공사 협의 추진 중

○ 금호아파트, 아트홀, 동성리, 군동면 중흥아파트 공급관 설치 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 도시가스 요금 대비 LPG, 등유 가격 하락으로 도시가스 경쟁력이 낮아

수요가구가 계획대비 급감하여 사업 지연

9-2. 지방채 발행사업 : 해당 없음

9-3. 민간투자사업

우리 강진군에서 ‘15년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’14년까지 부담액	’15년 부담액	’16년 이후 부담 예정액
BTL	강진문화복지 종합타운	강진문화원 주식회사	81,783	21,013	4,094	56,676	‘11.4. ~ ‘31.3.
	강진하수관거 정비사업	남양강진 씨앤지(주)	66,413	17,309	2,710	46,394	‘10.2 ~ ‘30.1

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

9-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

강진문화복지종합타운

담당자

문화관광과

이경진 (☎430-3322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화활동 공간 확보로 군민의 삶의 질 향상 및 지역문화 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기      간 :  2011. 4. 1~2031. 3. 31

○ 위      치 : 전남 강진군 강진읍 영랑로 1길 9

○ 민간사업자 : ㈜강진문화원

○ 총 사업비 : 79,759백만원

○ 사업 규모 : 부지 8,449.2㎡, 건물 16,032㎡

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등) : 2011. 4. 1 ~ 2031. 3. 31

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘14연도	‘15연도	‘16연도 이후
계	79,759	9,482	5,487	5,487	59,303
국 비	21,761	1,700	1,254	1,254	17,553
시 도 비
시군구비	57,998	7,782	4,233	4,233	41,750
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영중

□ 향후계획

○ 분기별 철저한 성과평가를 통한 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 민간투자사업 현황

사업명

강진군하수관거정비

담당자

상하수도사업소

유효석 (☎430-3791)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거 보급 및 기존 관거의 침입수/유입수 저감으로 하수종말처리장       의 운영효울 증대와 하수관거 기능의 극대화로 사업대상지역의 생활

환경 개선 및 선진화된 하수관거 유지관리 체계를 구축

□ 사업개요

○ 기     간 : 본공사 2006.6.23.~2010.2.22. 운영기간 2010.2.23.~2030.2.22

○ 위     치 : 강진읍 일원(강진, 서성, 호계)

○ 민간사업자 : 남양강진씨앤지(주)

○ 총 사업비 : 66,413백만원

○ 사업 규모 : 하수관거 43,933Km, 배수설비 2,900개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	‘15연도	‘16연도	‘16연도 이후
계	66,413	13,730	3,579	2,680	46,779
국 비	46,489	8,882	2,310	2,325	32,972
시 도 비
시군구비	19,924	4,848	1,269	1,267	13,452
기 타

□ 추진단계(운영 중, 시공 중, 시공준비 중 중 택1)

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 방류수역 수질개선

○ 관거정비에 따른 하수처리시설의 운영효율개선 및 하수처리 비용절감