9

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 강진군에서 ‘16년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2015년까지 집행사업비	2016년 소요사업비	2017년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률(%)
강진만 생태관 건립	5,200	-	-	3,000	2019.12.	2016	0%
다산 정약용 사의재 한옥체험관 조성	3,000	-	1,300	1,700	2018.4.	2016	20%
청소년 수련관 건립	6,000	-	700	5,300	2018.9.	2016	20%
강진 가우도 가고 싶은 섬 조성	4,000	-	1,600	2,400	2019.12.	2016	40%
강진만 생태탐방로 간 연결교량	3,000	-	-	3,000	2017.11.	2016	10%

‣ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2015년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는경우 ‘16년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

강진만 생태클러스터 조성

담당자

서재영 (☎430-3224)

□ 사업목적 및 필요성

○ 탐진강 및 강진만은 멸종위기 야생생물 등 남해안 하구의 평균 2배 많은 1,131  종의 생물이 서식하는 생물다양성의 보고 임(국립환경연구원 발표2015.9.25.)

○ 또한 탐진강 하구의 천연자원인 갈대군락지와 갯벌, 고니집단 서식지 등   생태자원과 연계한 생태클러스터 조성으로 자연학습 및 체험의 산교육장  활용

○ 조성된 생태체험·학습시설을 관광자원과 연계하여 환경보전의식 함양 및

지역경제 활성화 도모.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2020년

○ 위 치 : 강진군 강진읍 남포리 587번지 일원

○ 규 모 : 부지 15,000㎡, 에코타워 660㎡, 공원조성 1식, 생태관람시설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	3,000	-		400	2,600
국 비	1,500	-		200	1,300
시 도 비		-
시군구비	1,500	-		200	1,300
지 방 채		-
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  0%)

○ 해당 없음

□ 향후계획

○ 2018년 국비 확보 후 사업 시행

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

다산정약용

사의재 한옥체험관 조성

담당자

지방학예연구사

이재연(☎430-3342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내외 관광객들에게 우리고유의 전통 한옥생활 체험과 다산체험프로그램 등을 통한 전통문화를 보고 즐기고 체험할 수 있는 공간 제공

○ 다산선생의 발자취와 연계 가족단위 체류형 역사체험공간으로 조성하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 전남 강진군 강진읍 사의재길 일원

○ 규 모 : 2,350㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	3,000	1,300	833	867
국 비	1,800	780	500	520
시 도 비
시군구비	1,200	520	333	347
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 완료 : ‘17. 4.

○ 공사발주 : ‘17. 5.

○ 공사착공 : ‘17. 6.

□ 향후계획

○ 공사준공 : ‘18. 4.

○ 개관준비 : ‘18. 5. ~ 10.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

청소년 수련관 건립

담당자

지방시설7급

이재형(☎430-3343)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청소년들이 자유롭게 활동하고 창조적 자기 계발과 건전한 문화를 만들고 함께 나눌 수 있는 지역사회 내 중추적인 청소년 문화 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2018. 12.

○ 위 치 : 전남 강진군 강진읍 동성리 301-1 일원

○ 규 모 : 1,699㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	6,000	700	1,000	4,300
국 비	4,000		800	3,200
시 도 비
시군구비	2,000	700	200	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 및 인허가 절차 추진 ‘17. 7.

□ 향후계획

○ 공사착공 : ‘17. 10.

○ 공사준공 : ‘18. 09.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

강진 가우도 가고싶은 섬 조성

담당자

지방시설7급

오광록(☎430-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ □가고싶은 섬□사업의 지속적인 사업효과 창출 및 지역의 새로운 가치창출 유도

○ 섬 관광자원을 기반으로 하는 콘텐츠의 강화, 사업간의 연계체계 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. 2. ~ 2019. 12.

○ 위 치 : 전남 강진군 도암면 신기리(가우도 일원)

○ 규 모 : 320,745㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	4,000	1,600	800	800	800
국 비
시 도 비	2,000	800	400	400	400
시군구비	2,000	800	400	400	400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 군 관리계획변경 승인 : ‘15. 1.

○ 기본계획 수립 : ‘15. 9.

○ 실시설계 완료 : ‘15. 10.

□ 향후계획

○ 사업추진 : 2015. 11. ~ 2019. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

강진만 생태공원 상징조형물 제작․설치

담당자

지방시설7급

이재형(☎430-3343)

□ 사업목적 및 필요성

○ 강진의 생태다양성과 청정지역을 대표할 랜드마크를 설치하여 생태공원의 인지도 제고

○ 갈대밭 양안을 오고 갈 수 있는 관람동선 확보 및 에코 힐링 기능 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.

○ 위 치 : 전남 강진군 강진읍 목리 467(강진만)일원

○ 규 모 : H=20m이상, 양안 연결 보도교 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	‘17연도	‘18연도	‘19연도 이후
계	3,000		3,000	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		3,000	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 협상에 의한 계약 추진 ‘17. 7.

○ 실시설계 및 인허가 절차 추진 ‘17. 8.

□ 향후계획

○ 공사 착공 : ‘17. 9.

○ 공사 준공 : ‘17. 11.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

10-2. 지방채 발행사업 : 해당 없음

10-3. 민간투자사업

우리 강진군에서 ‘16년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액			계약 기간
				’15년까지 부담액	’16년 부담액	’17년 이후 부담 예정액
BTL	강진문화복지 종합타운	강진문화원 주식회사	46,096	25,996	5,063	76,952	‘11.4. ~ ‘31.3.
	강진하수관거 정비사업	남양강진 씨앤지(주)	66,413	19,004	3,167	44,242	‘10.2 ~ ‘30.1

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2015년까지는 집행액(결산기준), 2016년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

개별 민간투자사업 현황

사업명

강진문화복지종합타운 신축 임대형민자사업(BTL)

담당자

문화관광과 이경진(☎430-3322)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 문화적 향유제공을 위한 문화시설 확충

□ 사업개요

○ 기    간 : - 공사기간 : 2008. 03. 01 ~ 2011. 03. 31

- 운영기간 : 2011. 04. 01 ~ 2031. 03. 31

○ 위    치 :  전남 강진군 강진읍 영랑로 1길 9

○ 민간사업자 : 강진문화원(주)

○ 총사업비 :  46,096백만원

○ 사업규모 : 대지면적 8,449.2㎡, 연면적 16,032㎡(지하 1층, 지상3층)

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(최소수익보장 내역, 기간 등)

공사기간	시작일	2008. 3. 1	36개월	운영기간	시작일	2011. 4. 1	240개월
	종료일	2011. 3. 31			종료일	2031. 3. 31

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	108,011	20,479	5,517	5,063	76,952
국 비	20,055	4,028	1,254	1,106	13,667
시 도 비
시군구비	87,956	16,451	4,263	3,957	63,285
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 운영권 설정기간(2031. 3. 31까지) 임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

개별 민간투자사업 현황

사업명

강진군 하수관거정비

담당자

상하수도사업소 이명식

(☎ 430-3791)

□ 사업목적 및 필요성

○ 하수관거 보급 및 기존 관거의 침입수/유입수 저감으로 하수종말처리장의       운영효율 증대와 하수관거 기능의 극대화로 사업대상지역의 생활환경        개선 및 선진화된 하수관거 유지관리 체계를 구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 본공사 2006.6.23.~2010.2.22. 운영기간 2010.2.23.~2030.2.22.

○ 위    치 : 강진읍 일원(강진, 서성, 호계)

○ 민간사업자 : 남양강진씨앤지(주)3,167

○ 총사업비 : 66,413백만 원

○ 사업규모 : 하수관거 43,933km, 배수설비 2,900개소

□ 재정부담 현황

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2015년	2016년	2017년 이후
계	66,413	16,117	2,887	3,167	44,242
국 비	45,405	11,274	2,021	2,323	29,787
시 도 비
시군구비	21,008	4,843	866	844	14,455
기 타

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 하수방류수역(남해) 수질개선

○ 하수관거 정비에 따른 하수처리시설의 운영효율개선 및 하수처리 비용절감

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음