2017. 5.

- 2017년 정책실명제 -

중점관리 대상사업 내역서

정책실명제 중점관리 대상사업 현황

등록번호	정 책 명	사업부서	담당자	비고
	총 계	29건
2017-1	탐진강～강진만 생태탐방로 조성사업	환경축산과	이춘재	4
2017-2	강진한우 명품화 사업	환경축산과	김문환	5
2017-3	가우도 해양휴양단지 조성(도서개발사업)	해양산림과	김태웅	6
2017-4	마량면소재지 종합정비사업	해양산림과	김태웅	7
2017-5	마량해양레저복합공간 조성사업	해양산림과	김태웅	8
2017-6	강진대구 해양 체험관광 시설 조성	해양산림과	김태웅	9
2017-7	보은산 V-랜드 실시설계 용역	해양산림과	손 균	10
2017-8	보은산테마공원(V-랜드) 조성사업	해양산림과	손 균	11
2017-9	가고 싶은 섬 조성사업(가우도)	문화관광과	오광록	12
2017-10	강진 하멜촌(네덜란드 맥주타운) 조성	문화관광과	이재연	13
2017-11	도예촌 정비사업	문화관광과	최하정	14
2017-12	사의재 저잣거리 조성사업	문화관광과	이재연	15
2017-13	다산 정약용 사의재 한옥체험관 조성	문화관광과	이재연	16
2017-14	전라병영성 복원 사업	문화관광과	김동남	17
2017-15	오감만족 시의 거리 조성 사업	문화관광과	김동남	18

정책실명제 중점관리 대상사업 현황

등록번호	정 책 명	사업부서	담당자	비고
2017-16	강진 청자타워 건립 사업	문화관광과	오광록	19
2017-17	강진 월출산권 관광명소화 사업	문화관광과	이재연	20
2017-18	다산청렴수련원 건립 사업	문화관광과	이재형	21
2017-19	강진만 생태공원 상징조형물 제작 설치	문화관광과	이재형	22
2017-20	강진 군관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역	문화관광과	오광록	23
2017-21	공공디자인 기본계획 및 가이드라인 수립	지역개발과	박성아	24
2017-22	2020년 강진 군관리계획(재정비) 변경 결정 용역	지역개발과	양순실	25
2017-23	세계모란공원 2차 조성 사업	지역개발과	서재영	26
2017-24	강진읍 상가 전용주차장 조성 사업	지역개발과	강민선	27
2017-25	강진군 CCTV통합관제센터 구축 사업	총 무 과	고재갑	28
2017-26	만덕지구 농어촌 생활용수 개발 사업	상하수도사업소	김병옥	29
2017-27	영동평리지구 마을하수도 정비 사업	상하수도사업소	전 혁	30
2017-28	덕동․봉황지구 마을하수도 정비 사업	상하수도사업소	전 혁	31
2017-29	다목적 실내체육관 건립	스포츠산업단	여원정	32

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경축산과	②담당자 (연락처)	이춘재 (061-430-3222)
③정책사업명	탐진강-강진만 생태탐방로 조성사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2014년 ~ 2017년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 천연자원인 갈대군락지와 갯벌 등을 활용한 관광체험코스 개발 ○ 건강증진을 위한 국가자전거네트워크와 연계한 관광자원화로 조성 □ 사업개요 ○ 위 치 : 강진만 일원(강진, 군동, 칠량) ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년) ○ 사 업 비 : 40억 원(국비 20, 군비 20) / ‘16년 16억 원(국 8, 군 8) ○ 사업내용 : 갈대탐방 데크, 수변산책로, 탐조공원 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 기본계획 수립 및 타당성검토 용역 : 2012. 9. ~ 2013. 2. ○ 1단계 사업완료 : 갈대탐방 데크 377m, 탐조대 1개소 ○ 2단계 사업추진 : 2015. 3. 6.～2016. 09. 30. - 사업내용 : 갈대탐방 데크 1,216m , 목교 15m, 기차길데크105m ○ 3단계 사업추진 : 2016. 2. 11.～ 2016. 11. 29. - 사업내용 : 갈대탐방 데크 1,026m, 전망형 쉼터 등 6개소 □ 앞으로의 추진계획 ○ 주차장 및 화장실 등 기반시설 조성 ○ 남포 강진천 하류 탐방로간 연결

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	환경축산과	②담당자 (연락처)	김문환 (061-430-3252)
③정책사업명	강진한우 명품화사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2014년 ~ 2017년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 강진의 대표적인 향토자원인 한우를 지역성장의 핵심동력으로 육성 ○ 차별화된 강진 한우 가공식품화로 신규시장 개척 및 부가가치 증대□ 사업개요 ○ 사업기간 : 2014년 ~ 2017년(4년) ○ 사 업 자 : 강진한우명품화사업단(한우리영농법인) ○ 사 업 비 : 30억 원(국비 15.0, 도비 1.8, 군비 7.2, 민간 6.0) ○ 사업내용 : 강진한우 명품화 가공공장 및 통합홍보관 설치 □ 지금까지 추진실적 ○ “강진착한한우 명품관” 신축 개장 : ‘15. 9. 18. ○ 홈페이지 운영 및 쇼핑몰 등록 개시 판매 : ’15. 10. 1. ~ ○ 명품관 식육판매, 식육포장처리업 HACCP 인증 취득 : ’15. 12. 7. ○ ‘강진한우’ 지리적표시 단체표장 등록 : ‘16. 11. 3. ○ ‘착한한우’ 브랜드 홍보 요리 30선 책자 발간 : ‘16. 12. 9. ○ ‘착한한우’ 장조림 레시피 및 포장디자인 개발 : ‘16. 12. 23. □ 앞으로 추진계획 ○ 인터넷 온라인(쇼핑몰) 홍보마케팅 대도시 소비자 공략 - 홈페이지(2종), 쇼핑몰 8개소(11번가, G마켓, 옥션, 위메프 등) ○ 각종 언론매체 활용한 착한한우 브랜드 본격 홍보 ○ 여주발효사료 첨가제 급여 실증사업 : 200두(사업단 100두, 축협 100두) ○ 한우농가 역량강화 : 기술교육 프로그램 운영, 선진지 견학 등 ○ 대도시 소비자(단체, 아파트부녀회 등) 초청행사 : 5회 ○ 대․내외 직판행사 개최 - 강진착한한우 대도시 이동판매행사 : 3회 - 지역축제와 연계한 직거래 판매장터 운영 : 12회

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

해양산림과

② 담당자

(전화번호)

김태웅

(061-430-3265)

③ 정책사업명

가우도 해양휴양단지 조성(도서개발사업)

④ 선정기준

5억 원 이상의 건설사업

⑤ 사업기간

2008. 02.

~

2017. 12.

⑥ 주요내용

□ 추진배경

○ 낙후된 도서지역의 정주기반 시설을 확충하여 생산 활동 지원 및 도서민들의 삶의 질 향상 도모

□ 사업개요

○ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 가우도

○ 사업량

- 해안경관 진입로(1.0㎞), 상수도 시설(0.45㎞), 탐방로 개설(3.3천㎡)

오수처리시설(2.2㎞,45톤/일), 탐방로 개설(3.3천㎡)

○ 예산현황 : 1,867백만 원(지특 1,307, 도비 280, 군비 280)

- 연도별 예산액

(단위 : 백만 원)

총사업비			‘16까지 예산액			2017년 예산액
계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비
1,867	1,307	560	1,637	1,146	491	230	161	69

□ 지금까지 추진실적

○ 연도별 사업 추진 현황

연 도 별	세부사업	사 업 량	추진상황	비 고
계	6건	-	-	공정율
2008년 ~ 2009년	해안경관진입로	L=0.3㎞	해안경관진입로 L=0.3㎞ 완료	100%
2010년	상수도 시설	L=0.45㎞	추진완료	100%
2012년	오수처리시설	45톤/일	추진완료	100%
2013년	하수도 시설	L=2.2㎞	추진완료	100%
2014년	탐방로 개설, 수변공간	3.3천㎡	토공 및 수변공간조성	100%
2015년 ~2016년	해안경관진입로	L=0.7㎞	해안경관진입로 L=0.7㎞ 추진	100%
2017년	탐장로 개설	h=1.0㎞	실시설계 중	10%

□ 기대효과

○ 사회기반시설이 부족한 도서지역에 휴양림 탐방로를 개설하여      쾌적한 주거환경개선 및 관광객 편의 증대

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

해양산림과

② 담당자

(전화번호)

김태웅

(061-430-3265)

③ 정책사업명

마량면소재지 종합정비사업

④ 선정기준

5억 원 이상의 건설사업

⑤ 사업기간

2014. 02. 04.

~

2018. 12. 30.

⑥ 주요내용

□ 추진배경

○ 차별화된 어촌문화 형성 및 쾌적한 생활기반 조성

□ 사업개요

○ 사업 개요

○ 위 치 : 강진군 마량면 일원

○ 사업량

- 기초기반시설확충, 지역경관개선, 지역역량강화사업

․ 연결도로정비(L=65m), 5일시장정비, 가로경관 정비, 커뮤니티센터 조성 등

○ 예산현황 : 7,000백만 원(지특 4,900 , 군비 2,100)

- 연도별 예산액

(단위 : 백만 원)

총사업비			‘15년까지 예산액			‘16년 예산액			‘17년 예산액
계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비
7,000	4,900	2,100	1,302	911	391	2,000	1,400	600	3,698	2,589	1,109

○ 사업자 : 한국농어촌공사 강진지사(위탁)

□ 기대효과

○ 농어촌 지역의 거점공간인 면소재지에 맞춤형 개발을 통한      주민 편의 도모

○ 서비스 공급체제 구축으로 거점 기능 강화와 복지․소득 증진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

해양산림과

② 담당자

(전화번호)

김태웅

(061-430-3265)

③ 정책사업명

마량해양레저복합공간 조성사업

④ 선정기준

5억 원 이상의 건설사업

⑤ 사업기간

2013. 02. 08.

~

2018. 12. 30.

⑥ 주요내용

□ 추진배경

○ 해양관광 활성화 기반 조성 및 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위 치 : 강진군 마량면 일원

○ 사업량

- 북카페 설치 1동

․전망데크, 건축면적 189.15㎡, 2층 구조

- 해양레저 및 편익시설(간이 가족 낚시터 등)

○ 예산현황 : 5,000백만 원(지특 2,500 , 군비 2,500)

- 연도별 예산액

(단위 : 백만 원)

총사업비			‘16년까지 예산액			‘17년 예산액			‘18년 이후 예산액
계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비
5,000	2,500	2,500	3,000	1,500	1,500	600	300	300	1,400	700	700

□ 기대효과

○ 해양 관광을 자원화하여 새로운 소득 창출 및 휴식 편익시설 제공

○ 가족 단위 체험 관광객 유치 활성화 및 수산물 판매 촉진을 통한      지역경제 활성화에 기여

○ 기대효과 해양 관광을 자원화하여 새로은 소득 창출 및

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

해양산림과

② 담당자

(전화번호)

김태웅

(061-430-3265)

③ 정책사업명

강진대구 해양 체험관광 시설 조성

④ 선정기준

5억 원 이상의 건설사업

⑤ 사업기간

2014. 03. 10.

~

2018. 12. 30.

⑥ 주요내용

□ 추진배경

○ 해양관광 활성화 기반 조성 및 지역 경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 위  치 : 강진군 대구면 저두리 일원(상저, 중저, 하저마을)

○ 사업량

- 해양체험 관광시설 1식

․공중하강체험시설(짚라인 착륙장 등)

․갯벌체험 생태데크 : L=1.4㎞

○ 예산현황 : 2,800백만 원(지특 1,400 , 군비 1,400)

- 연도별 예산액

(단위 : 백만 원)

총사업비			‘16년까지 예산액			‘17년 예산액			‘18년 이후 예산액
계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비	계	국비	지방비
2,800	1,400	1,400	1,800	900	900	400	200	200	600	300	300

□ 기대효과

○ 가우도 출렁다리, 하저 어촌체험마을 등과 연계한 벨트화된

해양관광지로 개발하여 체류형 관광 도시민 유치

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양산림과	②담당자 (전화번호)	손균 (061-430-3294)
③정책사업명	보은산 V-랜드 실시설계 용역
④선정기준	5천만 원 이상의 용역사업	⑤사업기간	2015. 07. 03. ~ 2017. 08 .03.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 강진 지역 고유자원을 활용하여 도농교류 활성화 및 도시와 구별되는 농업․농촌 특유의 테마공원 조성 □ 용 역 비 : 121,837천 원(지특 50%, 지방비 50%) □ 용역내용 ○ 보은산 V-랜드 실시설계 용역 및 사전재해영향성검토용역(개발) 1식 ○ 용역기간 : 2015. 07. 03 ~ 2017. 08.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	해양산림과	②담당자 (전화번호)	손균 (061-430-3294)
③정책사업명	보은산테마공원(V-랜드) 조성 사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2015년~2018년
⑥주요내용	□ 사업목적 ○ 강진 지역 고유자원을 활용하여 도농교류 활성화 및 도시와 구별되는 농업․농촌 특유의 테마공원 조성 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년간) ○ 총사업비 : 5,000백만 원 ※ 16년도 사업비 : 1,338백만 원(16년 사업비 600, 15년 명시이월 738) ○ 사업내용 - 생활건강숲, 치유의 숲, 맨발산책로, 야생초화원 - 물놀이장, 야외공연장, 수변데크 조성 - 체험놀이숲, 힐링가든, 생태자연학습장, 테마산책길 □ 지금까지 추진실적 ○ 실시설계 착수 : 2015. 07. 03.(추진 중) ○ 물놀이장 조성 및 개장 : 2017. 07. ○ 군관리계획 변경(근린공원→유원지) : 전남도 지역계획과 입안 예정 □ 앞으로의 추진계획 ○ 진입도로, 주차장, 산책로, 치유의 숲 조성 등

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	오광록 (061-430-3344)
③정책사업명	가고 싶은 섬 조성 사업(가우도)
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2015.3.∼2019.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 전라남도의 절대 우위 자산인 섬을 아름답게 가꾸어 누구나 한번쯤 ‘가고 싶은 곳’으로 조성 ○ 섬의 수려한 자연풍광과 청정한 해산물에 대한 관심이 높아지면서 섬 여행수요 증가 추세 ○ 바쁜 일상과 대도시의 공해로 지친 현대인에게 휴식과 힐링의 기회를 제공하고, 가족의 소중함을 일깨워 주는 교육의 장으로 활용 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2015. 3. ~ 2019. 12.(5개년) ○ 총사업비 : 4,000백만 원 ○ 주요내용 - 주민소득지원사업(공동식당, 종합동신축, 특산물판매장), 마을경관개선(담장, 지붕, 폐가 리모델링), 섬 문화체험장, 숲속 향기의 섬 조성, 주민역량강화, 스토리텔링 개발 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 마을공동식당 리모델링 : ‘15. 12. ~ ‘16. 4. ○ 보행자 지킴이 보안등설치공사 : ‘16. 7. ~ ‘16. 8. ○ 숲속 산책로 조성 : ‘16. 8. ~ ‘16. 9. ○ 산책로 안전난간 설치 : ‘16. 11. ~ ‘16. 12. □ 기대효과 ○ 인근 문화유적지와 출렁다리, 복합낚시공원 등과 연계한 다양한 볼거리 및 체험시설을 제공하여 가우도를 강진의 대표 관광 상품으로 개발

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	이재연 (061-430-3342)
③정책사업명	강진 하멜촌(네덜란드 맥주타운) 조성
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2013년~2018년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 전라병영성에서 7년간 억류 생활한 헨드릭 하멜의 고향 네덜란드 생활 모습을 재현한 독특한 체류형 관광단지 조성 ○ 주변 문화역사 자원과 연계하여 관광인프라 구축 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2013. 1. ~ 2018. 12. ○ 위 치 : 강진군 병영면 지로리 일원 ○ 총사업비 : 15,000백만 원(지특 9,000, 군비 6,000) ○ 주요내용 - 전라병영성 하멜기념관 증축, 숙박시설(펜션), 풍차거리, 화훼단지, 공원 조성 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 편입토지 매입 추진 ○ 설계공모(기본설계) 추진 : ‘14. 7. ~ ’15. 5. ○ 실시설계 추진 : ‘15. 5. ~ ‘16. 10. ○ 공사 착공 및 추진 : ‘16. 12. ~ ’18. 12. □ 앞으로의 추진계획 ○ 군 관리계획 변경 및 실시계획 인가 : ‘17. 2. ~ 4. ○ 하멜기념관 증축공사 시행 : ‘2017. 2 ~ 2018. 6. □ 기대효과 ○ 전라병영성, 하멜기념관 등과 함께 역사 교육의 장으로 조성하여 관광활성화를 통한 주민소득 증대 및 지역경제 회생에 기여

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	최하정 (061-430-3345)
③정책사업명	도예촌 정비사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2007년∼2017년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 한국을 대표하는 유명 도예작가들을 유치ㆍ집단화하여 천년 전 찬란했던 옛 도공들의 창조적 예술 혼과 미를 되살리고자 함. ○ 기 조성된 청자촌을 확대 조성하는 사업으로 청자박물관, 고려청자요지 관광지와 연계한 고려청자 클러스터를 조성하여 문화와 관광, 교육이 어우러진 세계적인 청자도시로 만들고자 함. □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2008. ~ 2018. ○ 총사업비 : 165억 원 ○ 주요내용 - 분양필지 단지조성 기반시설(도로, 상·하수도,주차장, 광장 등), 녹지공간, 수목식재, 야외무대 정비 등 - 도예촌 정비 및 공원화사업(어린이 테마공원 및 휴식공간 확충, 조형물을 활용한 포토존 조성, 수공간 확충 등) □ 지금까지 추진실적 ○ 도예촌 주변 정비 실시설계용역: ‘14. 12. ~ ’15. 6. ○ 도예촌 지구단위계획 변경 고시공고 : 2016. 1. 21. ○ 도예촌 정비 및 공원화사업 협상에 의한 계약: 2016.9.28. ○ 도예촌 정비 및 공원화사업 실시설계 추진: ‘16. 9. ~ ’17. 2. □ 앞으로의 추진계획 ○ 도예촌 정비 및 공원화사업 공사 추진: ‘17. 2. ~ ’17. 10. □ 기대효과 ○ 고려청자문화의 체계적이고 영속적인 전통의 맥을 이어 세계 명품화 기반 구축 ○ 민간요 업체를 집단화 추진으로 전통 고려청자의 빛나는 역사성과 예술혼을 후대에 까지 전승

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	이재연 (061-430-3342)
③정책사업명	사의재 저잣거리 조성사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2016.1.∼2018.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 복합문화 공간 조성하여 과거와 현대가 교직하는 스트리트뮤지움 컨셉의 저잣거리 조성 ○ 강진 읍내권 중핵 관광 동선 구축 및 연계관광 자원 강화 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2016. 1. ~ 2018. 12. ○ 총사업비 : 4,075백만 원(국비2,635, 지방비1,440) ○ 주요내용 - 체험시설, 정주시설, 판매시설 - 한옥660㎡, 주차장965㎡, 녹지150㎡, 공원354㎡ 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 편입토지 매입 : 90% 완료 ○ 사의재 임시주차장 안내판 및 교통안전시설 설치 ○ 사의재 저젓거리 조성 제안공모 실시 : ‘16. 3. ~ ‘16. 4. ○ 사의재 저젓거리 조성 실시설계 완료 : ‘17. 03. □ 앞으로의 추진계획 ○사의재 저젓거리 조성 사업 : ‘17. 5. ~ 12. □ 기대효과 ○ 문화향유·체험이 창출되는 문화관광 거점 육성과 원주민 커뮤니티를 대상공간 운영주체로 양성하여 일자리 창출 및 지역경제 활성화에 기여

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	이재연 (061-430-3342)
③정책사업명	다산 정약용 사의재 한옥체험관 조성
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2016.1.∼2018.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 강진 사의재의 옛 모습과 함께 다산생활 체험프로그램 운영으로 역사문화관광체험의 필수 코스로 운영 ○ 기 조성된 사의재를 지역의 역사문화 자원과 연계하여 가장 예스러운 한옥 체험 테마 관광지로 조성 □ 사업개요 ○ 추진기간 : ‘15. 1. ~ ‘16. 12. ○ 총사업비 : 1,300백만 원 ○ 주요내용 - 다산 한옥체험관 신축 1,387㎡, 조형물, 쉼터 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 사의재 한옥체험관 제안공모 : ‘16. 3. ~ ‘16. 4. ○ 사의재 한옥체험관 실시설계 완료 : ‘17. 03. □ 앞으로의 추진계획 - 사의재 한옥체험관 건립공사 : ‘17. 5. ~ 12. □ 기대효과 ○ 영랑생가 및 고려청자요지, 다산초당 등 사의재는 매년 100만 명 이상의 관광객이 찾는 곳으로 다산선생의 발자취와 연계한 역사문화자연이 있는 테마 관광자원 개발로 지역주민의 소득향상과 지역경제 활성화에 크게 기여

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	김동남 (061-430-3321)
③정책사업명	전라병영성 복원 사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	1991년 ∼ 2020년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 전라병영성은 1417년(태종17년) 설치되어 조선조 500년간 전라도와 제주도를 포함한 53주 6진을 통할했던 호남지방 육군 총 지휘부였으며, 1895년(고종32년)에 폐영되어 1998년부터 복원 중임. ○ 당시의 건물은 사라지고 없으나 성의 규모를 알 수 있는 성곽의 흔적은 뚜렷이 남아 있어 문화재 원형복원을 통해 역사적 중요성과 의의를 한 차원 높여 민족의 얼이 담긴 역사의 산 교육장으로 활용 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 1991. ~ 2020. 12. ○ 총사업비 : 590억 원 ○ 주요내용 - 체성 및 옹성, 문루, 해자, 동헌, 객사 등 복원, 주변정비 □ 지금까지 추진실적 ○ 여장 복원 완료 ○ 북문루 복원 및 발굴지 정비 : 공정률 95% ○ 발굴조사(남측), 시굴조사(해자) 완료 □ 기대효과 ○ 유구 및 문헌 등 고증에 의한 원형복원으로 역사문화 체험장 조성 ○ 하멜기념관, 홍교, 은행나무, 한골목 등과 연계한 관광자원화

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	김동남 (061-430-3321)
③정책사업명	오감만족 시의거리 조성 사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2015년 ~ 2017년
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 다산과 시문학파시인 영랑, 현구의 발자취가 살아 숨쉬는역사적 명소를 연결하는 옛길을 최대한 활용하여 역사문화체험 테마거리를 조성 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2015 ~ 2017. ○ 총사업비 : 2,500백만 원 ○ 주요내용 - 영랑·현구·다산 테마(역사․시)공간 조성, 조형물설치, 휴게공간 및 부대시설 설치 등 / L=1.5km □ 지금까지 추진실적 - 시의거리 조성(1차)분 / 협상에 의한 계약 추진 ․기본 및 실시설계 : '15. 6. ~ ‘16. 3. 30. □ 앞으로의 추진계획 - 시의거리 조성(2차분) 설계용역 : ‘17. 2. ~ 5. 30. ․현구생가복원, 조형물, 편의시설, 포토존 조성 등 - 현구생가복원 및 조형물 설치공사 : ‘17. 7. ~ 12. □ 기대효과 ○ 대한민국 대표적 문학적 감성을 느낄 수 있는 역사․문화체험 테마공간 조성으로 체류형 가족단위 관광객 유치에 기여

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	오광록 (061-430-3344)
③정책사업명	강진 청자타워 건립 사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2011.1.∼2018.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 출렁다리, 복합낚시공원, 자연생태환경 등과 연계한 다양한 볼거리제공으로 강진군 대표 관광브랜드 육성 ○ 인근 문화유적지와 출렁다리, 복합낚시공원 등과 연계한 다양한 볼거리를 제공하여 가우도를 강진의 대표 관광 상품으로 개발 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2011. 1. ~ 2018. 12. ○ 총사업비 : 4,666백만 원 ○ 주요내용 - 청자 전망탑 1동(25m) 녹지공원조성, 부대시설 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 기본 및 실시설계 : ‘13. 7. ~ ‘14. 7. ○ 전망대 진입도로 및 부지정비 : ‘14. 8. ~ ‘15. 5. ○ 청자타워 건립 및 주변 생태공원 조성 : : ‘15. 6. ~ ‘16. 10. □ 앞으로의 추진계획 ○ 주차장 조성 및 부대시설 정비 : ‘18. 1. ~ ‘18. 12. □ 기대효과 ○ 인근 문화유적지와 출렁다리, 복합낚시공원 등과 연계한 다양한 볼거리를 제공하여 가우도를 강진의 대표 관광 상품으로 개발

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	이재연 (061-430-3342)
③정책사업명	강진 월출산권 관광명소화 사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2014.1.∼2018.12.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 월출산 주변에 분포된 다양한 관광자원을 유기적으로 연계함으로서 지속발전 가능한 테마관광지로 육성 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2014. 1. ~ 2018. 12. ○ 총사업비 : 8,900백만 원 ○ 주요내용 - 테마형 자연생태공원(동백나무숲길, 계곡, 연못복원 등) 12승경, 삼림욕장, 안채복원, 기반시설조성 및 부대시설 등 □ 지금까지 추진실적 ○ 기본계획 및 타당성조사용역 : 2013. 2. 22. ○ ‘백운동 정원의 문헌기록 연구’ 용역 : 2014. 7. ～ 12. ○ 12경 복원 및 생태탐방로 실시설계 : 2014. 1. ~ 8. ○ 12경 복원 및 생태탐방로 공사 : 2014. 9. ~ 2015. 7. ○ ‘백운동 문화재 지정을 위한 연구’ 용역 : 2015. 9. ~ 2016. 6. ○ ‘백운동 정원 내 안채 정밀발굴조사’ 용역 : 2016. 3. ~ 5. ○ 제1회 백운동 별서정원 학술심포지엄 개최 : 2016. 11. 3. □ 앞으로의 추진계획 ○ 백운동 안채 복원공사 : 2017. 4. ~ 10. ○ 백운동 전시관 신축 실시설계 및 공사 : 2017. ~ 2018. □ 기대효과 ○ 월출산 주변에 분포된 다양한 관광자원을 유기적으로 연계함으로써 가족단위의 체류가 가능한 테마관광지로 육성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)	이재형 (061-430-3343)
③ 정책사업명	다산청렴수련원 건립 사업
④ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤ 사업기간	2017. 1. 4. ~ 2018. 7. 31.
⑥ 주요내용	□ 추진배경 ○ 전남도 공무원교육원 이전확정으로 다산 청렴교육을 실시하는 교육시설 필요 ○ 청소년들이 자유롭게 활동하고 자기계발과 건전한 문화를 나눌 수 있는 문화공간 조성 □ 사업개요 ○ 위 치 : 강진군 강진읍 동성리 547번지 외 18필지 ○ 사 업 량 : 청소년수련관 건립, 숙박시설, 한옥체험관 건립 ○ 예산현황 : 11,200백만 원(국비 50, 군비 62) □ 지금까지 추진실적 ○ 공유재산 관리계획 승인(군의회) : ‘16. 5. ○ 전라남도 투융자 심사 완료 : ‘16. 8. ○ 군관리계획시설 결정 : ‘16. 5. 12. ○ 청렴수련원 건립 설계공모 : ‘16. 12. / 심사 및 당선작 선정 ○ 실시설계 용역 착수 : ‘17. 1. 4. □ 앞으로의 추진계획 ○ 실시설계 용역 완료 및 사업 실시계획 인가 : ‘17. 6. ○ 사업시행계획 공고 및 용지 보상 : ‘17. 7. ~ 8. ○ 다산청렴수련원 건립사업 착공 : ‘17. 9.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	문화관광과	② 담당자 (전화번호)	이재형 (061-430-3343)
③ 정책사업명	강진만 생태공원 상징조형물 제작 설치
④ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤ 사업기간	2017. 4. 6. ~ 2017. 9. 30.
⑥ 주요내용	□ 추진배경 ○ 강진만의 생태 다양성과 청정 지역을 대표할 랜드마크를 설치하여 생태공원 인지도 제고 및 갈대밭 양안을 통행할 수 있는 관람동선을 확보하여 생태관광 클러스터 조성 등 기획개발 사업과 연계성 확보 □ 사업개요 ○ 위 치 : 강진군 강진읍 목리 467 일원 ○ 사 업 량 : 상징조형물 1식(높이 20m이상, 양안 연결로 등) ○ 예산현황 : 3,000백만 원(군비 3,000) □ 지금까지 추진실적 ○ 지방재정 투융자 심사 완료 : ‘16. 11. ○ 상징조형물 제작 설치 공모 : ‘17. 4. 6. □ 앞으로의 추진계획 ○ 상징조형물 제작 설치 제안서 접수 및 평가 : ‘17. 6. ○ 사업 실시계획 인가 및 사업시행계획 공고 : ‘17. 6. ○ 실시설계 및 제작 설치 : ‘17. 6. ~ 9.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	문화관광과	②담당자 (전화번호)	오광록 (061-430-3344)
③정책사업명	강진 군관리게획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역
④선정기준	5천만 원 이상의 용역사업	⑤사업기간	2017.3.∼2018.1.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 강진군 대구면 저두리(가우도 관광지) 토지 이용 합리화 및 그 기능을 증진시켜 당해 지역을 체계적으로 개발·관리 □ 사업개요 ○ 추진기간 : 2017. 3. ~ 2018. 1. ○ 총사업비 : 76백만 원 ○ 주요내용 - 과업면적 : 50,000㎡(대구면 저두리 일원) - 군관리계획(용도지역) 변경 및 지구단위계획 수립 등 1식 □ 지금까지 추진실적 ○ 강진군 일상감사(계약심사) : ‘17. 2. 15. ○ 군관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역 착공: ‘17. 3. 21. □ 앞으로의 추진계획 ○ 군관리계획(용도지역 및 지구단위계획) 결정(변경) 용역 준공: ‘18. 1. 14. □ 기대효과 ○ 용도지역 변경을 통해 무분별한 난개발 방지, 체계적이고 균형있는 행정계획을 수립하여 바람직한 발전 방향을 제시

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (전화번호)	박성아 (061-430-3363)
③정책사업명	공공디자인 기본계획 및 가이드라인 수립
④선정기준	5천만 원 이상의 용역사업	⑤사업기간	‘17. 5. ~ ’18. 6.
⑥주요내용	□ 추진목적 ○ 군의 역사‧문화‧관광 도시로서 경쟁력을 갖기 위해 강진의 고유한 이미지를 반영한 공공디자인 비전과 전략을 제시하고 체계적인 디자인 관리 기준 마련 □ 용역개요 ○ 과업명 : 강진군 공공디자인 기본계획 및 가이드라인 수립 용역 ○ 위 치 : 강진군 행정구역 전역 ○ 용역비 : 200백만 원(군비) ○ 과업내용 - 공공디자인 기본계획 수립 - 유형별 공공디자인 가이드라인 수립 - 공공디자인 표준디자인 매뉴얼개발 수립 - 공공디자인 개선 시범사업 계획 수립 □ 추진계획 ○ 용역 발주 : 2017. 5. ○ 사업자 선정 : 2017. 6. ○ 용역 추진 : 2017. 7. ~ 2018. 6.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (전화번호)	양순실 (061-430-3364)
③정책사업명	2020년 강진 군관리계획(재정비) 변경 결정 용역
④선정기준	5천만 원 이상의 용역사업	⑤사업기간	‘14. 6. 23. ~ ’18. 6. 24.
⑥주요내용	□ 추진목적 ○ 시․군의 지속가능한 발전 도모, 장기발전방향을 공간에 실현 시키는 법정계획 □ 추진배경 ○ ‘국토의 계획 및 이용에 관한 법률’ 제34조에 따라 5년마다 군관리계획에 대한 타당성 검토 후 정비 □ 용역개요 ○ 군관리계획 재정비, 교통성 검토, 군계획시설 단계별집행계획, 사전재해영향성검토, 경관성 검토, 토지적성평가 등 ○ 계약금액 : 631백만 원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①사업부서	지역개발과	②담당자 (전화번호)	서재영 (061-430-3362)
③정책사업명	세계모란공원 2차 조성 사업
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2014. 1.∼2017. 6.
⑥주요내용	□ 추진배경 ○ 영랑생가와 보은산 도시공원 주변의 자연환경과 문학적 공간을 연계 모란을 주제로 한 사계절 꽃피는 세계모란공원을 조성 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2014. 1. ~ 2017. 6. - ‘15년 사업비 : 1,567백만 원(국비 940, 군비 627) - ‘16년 사업비 : 800백만 원(국비 - , 군비 1,100) - ‘17년 사업비 : 800백만 원(국비 - , 군비 755) ○ 면적 : 9,000㎡ / 2,700평 ○ 위 치 : 강진읍 서성리 200-9번지 일원 ○ 주요내용 - 사계절 모란전시관, 세계모란원, 석가산, 모란동산 등 - 야간 경관 조명 설치 □ 지금까지 추진실적 ○ 편입토지 보상 : 24필지중 20필지 보상 완료, 6세대 철거 완료 ○ 공원조성계획 결정 및 지형도면 고시 / 2015. 11. 19. ○ 공원조성공사 완료 / 2016. 12. 30. ○ 야간 경관 조명 설치 완료 / 2017. 3. 30. □ 앞으로의 추진계획 ○ 세계모란공원 내 시설 보완 및 주차장 조성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서

지역개발과

② 담당자

(전화번호)

강민선

(061-430-3374)

③ 정책사업명

강진읍 상가 전용주차장 조성 사업

④ 선정기준

5억 원 이상의 건설사업

⑤ 사업기간

2017년~2018년

⑥ 주요내용

□ 사업목적

○ 읍 시가지 상가밀집지역 주차난 해소를 통해 주민 교통편의 제공 및 상가 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2017년 ~ 2018년(2년 간)

○ 위    치 : 강진읍 남성리 46-3 외 4필지(농협중앙회 옆)

○ 사업내용 : 강진읍 상가 전용주차장 조성

부지면적 : 1,124㎡(70면)

○ 예산현황 : 2,500백만 원(지특 1,250 , 군비 1,250)

- 연도별 예산액

총사업비			‘17년 예산액			‘18년 예산액
계	국비	지방비	계	국비	군비	계	국비	군비
2,500	1,250	1,250	1,600	800	800	900	450	450

(단위 : 백만 원)

□ 기대효과

○ 읍시가지 상가 밀집지역 주차난 해소로 지역경제 활성화에 기여

○ 2017년 강진 방문의 해를 맞이하여 관광객 교통시설 편의제공

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	총무과	② 담당자	고재갑 (061-430-3300)
③ 정책사업명	강진군 CCTV통합관제센터 구축사업
④ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤ 사업기간	2017. 1월 ~ 12월
⑥ 주요내용	□ 사업내용 ○ CCTV통합관제센터 건물 신축 - 기 간 : 2017. 4. ~ 8.(5개월) - 위 치 : 강진군 강진읍 남성리 108-3 후면주차장 - 규 모 : 1층 346㎡(105평) - 사업비 : 698백만 원(군비) ○ 통합관제센터 시스템 구축 - 기 간 : 2017. 7. ~ 12.(6개월) - 대 상 : 관내 CCTV 386대(군 243, 초등학교 143) - 사업비 : 1,134백만 원(국 567, 도 154.8, 군 361.2, 교육청 51) - 내 용 : CCTV 관제·영상·보안시스템 및 부대장비 구축 ○ 재난종합상황실 구축 - 사업비 : 250백만 원(국 100, 군 150) ※군비 추경요구 - 내 용 : 재난관리용 CCTV, 수위‧우량 관측장비, 모니터링 시스템 □ 추진계획 ○ 관제시스템 기본계획 수립 2017. 2. 27. ○ 관제시스템 구축공사 발주 및 완공 2017. 4. ~ 10. ○ 통합관제센터 모니터링 요원 채용 2017. 9. ~ 10. ○ 통합관제센터 시범운영 2017. 11. ~ 12. ○ 강진군 CCTV통합관제센터 개소 2018. 1.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	상하수도사업소	② 담당자 (전화번호)	김병옥 (061-430-3774)
③ 정책사업명	만덕지구 농어촌 생활용수 개발사업
④ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤ 사업기간	2017년~2019년
⑥ 주요내용	□ 사업목적 ○ 군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여 □ 사업개요 ○ 위 치 : 도암면(만덕리) 일원 ○ 사업기간 : ‘17년 ~ ‘19년 ○ 총사업비 : 4,000백만 원(지특 2,800 지방비 1,200) ○ 사업내용 - 배수지 2지(300톤) - 송수관로 L=1.1km - 급․배수관로 L=30.1km □ 지금까지 추진실적 ○ 실시설계용역 발주 - 용역기간 : ‘17. 3. 3. ~ 8. 29.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	상하수도사업소	② 담당자 (전화번호)	전 혁 (061-430-3793)
③ 정책사업명	영동·평리지구 마을하수도 정비사업
④ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤ 사업기간	2016년~2018년
⑥ 주요내용	□ 사업목적 ○ 면소재지 내 수질오염 예방 및 쾌적한 주거환경 조성 □ 사업개요 ○ 위 치 : 강진군 칠량, 군동 면소재지 일원(4개 마을) ○ 사업기간 : ‘16년 ~ ‘18년 ○ 총사업비 : 7,889백만 원(국비 5,522 지방비 2,367) ○ 사업내용 - 영동지구 : 220톤/일, 하수관로(D100∼D200) L=15.8km - 평리지구 : 100톤/일, 하수관로(D100∼D200) L=8.4km □ 추진계획 ○ ‘17. 6. 30. : 하수관로공사 1차분 준공 ○ ‘18. 1. : 하수관로공사 2차분 준공 ○ ‘18. 2. ~ 6. : 시운전 및 사용개시

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 사업부서	상하수도사업소	② 담당자 (전화번호)	전 혁 (061-430-3793)
③ 정책사업명	덕동·봉황지구 마을하수도 정비사업
④ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤ 사업기간	2017년~2019년
⑥ 주요내용	□ 사업목적 ○ 마을주변 수질오염 예방 및 쾌적한 주거환경 조성 □ 사업개요 ○ 위 치 : 강진군 강진읍 덕동, 칠량면 봉황마을 일원(4개 마을) ○ 사업기간 : ‘17년 ~ ‘19년 ○ 총사업비 : 7,889백만 원(국비 5,522 지방비 2,367) ○ 사업내용 - 덕동지구 : 85톤/일, 하수관로(D100∼D200) L=8.7km - 봉황지구 : 55톤/일, 하수관로(D100∼D200) L=9.5km □ 추진계획 ○ ‘17. 5. 30. : 실시설계용역 준공 ○ ‘17. 6. : 각종 인허가 ○ ‘17. 7. : 공사착공 ○ ‘19. 12. : 공사준공

정책실명제 중점관리 대상사업 내역서

①사업부서	스포츠산업단	②담당자 (연락처)	여원정 (061-430-3822)
③정책사업명	다목적 실내체육관 건립
④선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑤사업기간	2014. 1.～2017. 5.
⑥주요내용	□ 사업개요 ○ 위 치 : 강진군 군동면 호계리 종합운동장내 ○ 사업량 : 2,405㎡(지하1층, 지상2층) ○ 사업비 : 55억 원(지특 18, 특교6, 도비3, 군비 28) ○ 내 용 : 경기장 1,600㎡, 기타부대시설 1식 □ 사업목적 ○ 전국 규모 대회를 유치할 수 있는 다목적 실내체육관 건립 으로 4계절 스포츠 기반시설 구축 ○ 실내체육관 이용한 각종 생활체육 동호회 활동 기회 부여 □ 추진계획 ○ 실시설계 용역 의뢰 : 2014. 1. ○ 설계 용역 시행 및 건설기술 심의 : 2014. 2. ~ 2014. 5. ○ 공사계약 및 착공 : 2015. 8. ○ 공사 준공(예정) : 2017. 5.