2022. 5.

2022년 강진군 정책실명제 중점관리 대상사업 목록

	강 진 군 (기획홍보실)

정책실명제 중점관리 대상사업 현황 목록

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2022-01	2022년 신재생에너지보급 융복합지원사업	일자리창출과	임준형 과 장(행정5) 윤상묵 주무관(행정7)
2022-02	상권활성화사업(4차년도)	일자리창출과	임준형 과 장(행정5) 서정진 주무관(행정7)
2022-03	문화관광형시장 육성사업	일자리창출과	임준형 과 장(행정5) 서정진 주무관(행정7)
2022-04	농촌자원복합산업화 지원사업	일자리창출과	임준형 과 장(행정5) 이재연 주무관(행정7)
2022-05	국가중요농업유산 보전관리사업	친환경농업과	송승언 과 장(농업5) 윤영준 차 장(농업6)
2022-06	스마트 그린도시사업	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 전 혁 차 장(시설6)
2022-07	강진만 도시생태축 복원사업	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 전 혁 차 장(시설6)
2022-08	강진만 생태탐방학습홍보관 조성사업	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 전 혁 차 장(시설6)
2022-09	강진만 생태체험관 조성사업	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 전 혁 차 장(시설6)
2022-10	환경정화센터 2단계 매립시설 설치사업	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 이춘재 팀 장(환경6)
2022-11	환경정화센터 2단계 소각시설 설치사업	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 차혜영 차 장(환경6)
2022-12	2050 탄소중립을 위한 강진군 기후변화 대응계획 수립용역	환경축산과	황인준 과 장(농업5) 이혜민 주무관(행정7)
2022-13	지방정원 조성사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 황현진 주무관(녹지6)
2022-14	보은산 테마공원(V-랜드) 조성 사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 양혜철 주무관(녹지6)
2022-15	목재친화도시 조성사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 최보길 주무관(녹지6)
2022-16	생활밀착형 숲 조성사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 황현진 주무관(녹지6)
2022-17	칠량 봉황항 어촌뉴딜 300사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설6)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2022-18	2022년 산림유역관리사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 최수빈 주무관(녹지9)
2022-19	미세먼지 차단숲 조성	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 장운기 주무관(녹지9)
2022-20	가우도권역 어촌뉴딜300사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설6)
2022-21	마량항 정비사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설6)
2022-22	도암 망호항 어촌뉴딜300사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 차형태 주무관(시설6)
2022-23	가우도 섬숲 생태복원사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 손 균 주무관(녹지7)
2022-24	주작산 자연휴양림 보완사업	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 최준동 주무관(녹지7)
2022-25	강진만 패류감소 원인조사 용역	해양산림과	임창복 과 장(행정5) 박남철 팀 장(수산6)
2022-26	계획공모형 지역관광개발사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 양혜은 주무관(행정7)
2022-27	강진의 몽마르뜨 언덕 조성	관광과	김영빈 과 장(행정5) 정동진 주무관(시설9)
2022-28	강진만 노을경관 조성사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 정동진 주무관(시설9)
2022-29	강진 삼십리 벚꽃길 조성사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
2022-30	대구 저두지구 관광편의시설 조성	관광과	김영빈 과 장(행정5) 김재성 주무관(시설7)
2022-31	분홍나루 노을공원 관광자원화사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
2022-32	마량 횟집거리 조성사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 최창준 주무관(위생7)
2022-33	가우도 도서종합개발사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 김재성 주무관(시설7)
2022-34	가우도 향기의 섬 조성사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 김재성 주무관(시설7)
2022-35	다산유적지 일원 애절양 공원 조성사업	관광과	김영빈 과 장(행정5) 서영권 주무관(시설7)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2022-36	강진 사초 펫동반 오토캠핑장 조성	관광과	김영빈 과 장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
2022-37	작은 영화관 조성사업	문화예술과	윤성일 과 장(행정5) 최경미 주무관(행정7)
2022-38	강진 하멜촌 조성사업	문화예술과	윤성일 과 장(행정5) 오남원 주무관(시설7)
2022-39	전라 병영성 복원사업	문화예술과	윤성일 과 장(행정5) 오남원 주무관(시설7)
2022-40	강진읍 도시재생 뉴딜사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 진희순 주무관(행정7) 김길수 주무관(행정7) 배지민 주무관(시설7)
2022-41	강진읍 도시재생 인정사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 배지민 주무관(시설7)
2022-42	지역개발사업[지역수요맞춤지원사업]	건설과	위길복 과 장(시설5) 박 훈 주무관(시설9)
2022-43	병영면 도시재생 뉴딜사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 김길수 주무관(행정7) 박 훈 주무관(시설9)
2022-44	금강지구 대구획경지정리사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2022-45	풍동지구 배수개선사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2022-46	봉황지구 배수개선사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2022-47	만덕지구 대구획경지정리사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2022-48	덕서지구 대구획경지정리사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2022-49	도림지구 대구획경지정리사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 오광록 주무관(시설7)
2022-50	계라제 수리시설 개보수사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 김법하 주무관(시설9)
2022-51	장등제 수리시설 개보수사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 김법하 주무관(시설9)
2022-52	도림 1제 수리시설 개보수사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 김법하 주무관(시설9)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2022-53	군도3호선 확포장공사	건설과	위길복 과 장(시설5) 박신남 주무관(시설7)
2022-54	고성사 진입도로 위험사면 정비공사	건설과	위길복 과 장(시설5) 손은숙 주무관(시설9)
2022-55	국도23호선 남포교차로 정비사업	건설과	위길복 과 장(시설5) 박신남 주무관(시설7)
2022-56	강진 제2일반산업단지 조성	건설과	위길복 과 장(시설5) 정성철 주무관(시설7)
2022-57	농촌 신활력 플러스 사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 문주하 주무관(시설8)
2022-58	강진읍 농촌중심지활성화사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 조성재 주무관(시설7)
2022-59	강진만 생태공원 기반시설 조성사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 문주하 주무관(시설8)
2022-60	2022년 테마형 서비스거점 조성	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 조성재 주무관(시설7)
2022-61	다산 청렴수련원 주변정비 사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 문주하 주무관(시설8)
2022-62	영포지구 새뜰마을 사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 문주하 주무관(시설8)
2022-63	도암면 농촌중심지활성화사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 조성재 주무관(시설7)
2022-64	칠량면 기초생활거점 육성사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
2022-65	군동면 기초생활거점 육성사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
2022-66	대구면 기초생활거점 육성사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
2022-67	옴천면 기초생활거점 육성사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
2022-68	신전권역단위 거점개발사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
2022-69	장동지구 새뜰마을사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
2022-70	내동지구 새뜰마을사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2022-71	동삼인지구 새뜰마을사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
2022-72	송정지구 새뜰마을사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
2022-73	강진읍 목리 마을만들기사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
2022-74	성전면 송학 마을만들기사업	농어촌개발과	조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
2022-75	강진천 지방하천정비사업	안전재난교통과	박정식 과 장(행정5) 정성운 주무관(시설7)
2022-76	강진 동성 마을정비형 공공임대주택사업	민원봉사과	김동남 과 장(시설5) 이세옥 주무관(시설7)
2022-77	강진 호계 행복주택사업	민원봉사과	김동남 과 장(시설5) 민명기 주무관(시설9)
2022-78	도림지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-79	송학지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-80	강진군 노후상수관망 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-81	스마트 관망관리 인프라 구축사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 정세훈 주무관(공업8)
2022-82	강진 서성처리분구 하수관로 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-83	풍동지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-84	삼신지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-85	비자지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-86	시목석천지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-87	삼흥지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-88	계율지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)

①등록번호	② 정책사업명	③ 사업부서	④ 담당자
2022-89	저두지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-90	마량 하수처리장 증설사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-91	마량 신마처리분구 하수관로 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-92	신전 송천수양지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-93	송월지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-94	월남송학지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-95	성전 오산처리분구 하수관로 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-96	작천지구 농어촌생활용수개발사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
2022-97	구상지구 마을하수도 정비사업	상하수도사업소	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
2022-98	양무정(국궁장) 개축사업	스포츠산업단	허진영 단 장(행정5) 노상법 주무관(공업7)
2022-99	파크골프장 조성사업	스포츠산업단	허진영 단 장(행정5) 노상법 주무관(공업7)
2022-100	고려청자박물관 스마트박물관 조성사업	고려청자박물관	마국진 관 장(행정5) 김대원(학예연구사)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2022년 신재생에너지보급 융복합지원사업
② 추진배경	○ 친환경 에너지 이용을 통한 기후변화에 대응 및 에너지자립률 향상 ○ 군민의 전기요금 절감 및 화석연료 사용 감축을 통한 탄소중립 실천
③ 사업개요	○ 사업대상 : 강진읍, 군동면, 도암면, 신전면 일원 ○ 사 업 량 : 태양광 466개소 1,652㎾, 태양열 15개소 90㎡ ○ 사 업 비 : 30억 원 ○ 주요내용 : 주택과 건물 등에 태양광, 태양열 등 현장 여건에 적합한 에너지원 설치 지원
④ 사업부서	일자리창출과		⑤ 담당자	임준형 과 장(행정5) 윤상묵 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2022. 1월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>
○ 2022년 신재생에너지 융복합 지원사업 수요조사 선정결과 확정 안내		‘21.12.15.	윤영상 신재생에너지보급실장 유영선 팀장 정선영 주임
○ 2022년 신재생에너지 융복합 지원사업 협약체결		‘22. 2. 9.	임준형 일자리창출과장 백경자 일자리경제팀장 윤상묵 주무관
○ 2022년 신재생에너지 융복합 지원사업 자부담금 납부 안내		‘22. 3. 4.	임준형 일자리창출과장 백경자 일자리경제팀장 윤상묵 주무관
○ 2022년 신재생에너지 융복합 지원사업 선급금 지급 * 지급금액 : 18.3억 원		‘22. 5. 9.	유미자 부군수 임준형 일자리창출과장 백경자 일자리경제팀장 윤상묵 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	상권활성화사업(4차년도)
② 추진배경	인구감소, 지역경제와 상권의 침체로 어려움을 겪고 있는 강진읍 상권이 자생력을 확보하여 지역경제활성화
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2018. ~ 2023. ❍ 위 치 : 강진군 강진읍 특성화거리 ❍ 총사업비 : 68억원(국비 34, 군비 34) ❍ 사업규모 : 면적 100,100㎡, 점포수 413개소 ❍ 사업내용 : 환경개선, 상권활성화, 조직운영
④ 사업부서	일자리창출과		⑤ 담당자	임준형 과 장(행정5) 서정진 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2018년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 상권활성화 사업 설명회 - 사업 정책방향 및 사업내용, 주요 착안사항 안내		'21.5.28.	소상공인시장진흥공단
❍ 상권활성화 사업 3년차 세부시행계획서 변경 승인		'21.6.24.	임준형 과 장 백경자 팀 장 장민혁 주무관
❍ 상권활성화 사업 협의회 - 3년차 사업추진실적 보고, 4년차 세부시행계획 발표 및 의견수렴		'21.9.7.	강진군문화관광재단
❍ 상권활성화 사업 4년차 세부시행계획서 승인		'21.10.22.	임준형 과 장 백경자 팀 장 최창균 차 장
❍ 상권활성화 사업 협의회 - 4년차 사업추진실적 보고 및 향후 시행계획 발표		'22.3.22.	강진군문화관광재단
❍ 상권활성화사업(1~3년차) 지방비 반납고지서 송부		'22.5.6.	임준형 과 장 백경자 팀 장 서정진 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	문화관광형시장 육성사업
② 추진배경	❍ 강진 고유의 문화요소를 접목한 경쟁력 있는 특화콘텐츠를 도입·운영함으로써 국·내외 관광객 유입은 물론 지역경제 활성화 기여
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2021. 3. ~ 2022. 12. ❍ 위 치 : 강진중앙로상가 ❍ 총사업비 : 8.4억원(국비 4.2, 군비 4.2) ❍ 사업규모 : 면적 25,895㎡ / 99점포 ❍ 사업내용 : 특화거리조성, 특화상품 개발, 자생력 강화 등
④ 사업부서	일자리창출과		⑤ 담당자		임준형 과 장(행정5) 서정진 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 문화관광형시장 육성사업 1차년도 사업추진협의회 개최		'21.5.20.		문화관광형시장 육성사업단
❍ 문화관광형시장 육성사업 1차년도 사업계획 승인		'21.6.1.		광주·전남지방중소벤처기업청
❍ 관광객 유입 촉진 사업, 자생력 강화 사업, 홍보 및 이벤트 강화 사업 등 추진		'21. 6.~12.		문화관광형시장 육성사업단
❍ 문화관광형시장 육성사업 1차년도 결과보고		'22.1.7.		문화관광형시장 육성사업단
❍ 문화관광형시장 육성사업 1차년도 성과 평가		'22.1.27.		소상공인시장진흥공단
❍ 문화관광형시장 육성사업 2차년도 사업추진협의회 개최		'22.5.2.		문화관광형시장 육성사업단
❍ 문화관광형시장 육성사업 1차년도지방비 반납고지서 송부		'22.5.6.		임준형 과 장 백경자 팀 장 서정진 주무관
❍ 문화관광형시장 육성사업 2차년도사업계획 최종 승인 요청		'22.5.7.		임준형 과 장 백경자 팀 장 서정진 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농촌자원복합산업화 지원사업
② 추진배경	❍ 칠량농공단지 오수관로 신설공사 등 노후 농공단지 기반시설 정비·확충 ❍ 입주기업의 근로환경 개선, 생산성 향상 및 지역경제 활성화
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2021. ~ 2022. ❍ 위 치 : 강진군 칠량면 송로리 칠량농공단지 내 ❍ 총사업비 : 10억원(국비 5, 군비 5) ❍ 사업내용 : 칠량농공단지 오수관로 신설 ❍ 사업규모 : 오수관로 1,499m[육상(D=700, L=599m)+해상(D=500,L=900m)], 가압펌프 2대, 맨홀26개 등
④ 사업부서	일자리창출과		⑤ 담당자		임준형 과 장(행정5) 이재연 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021년~2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 칠량농공단지 오수관로 신설공사 실시설계용역 추진계획 수립		‘21.7.20.		이상심 부군수 임준형 과 장 최은하 팀 장 남보라 차 장
○ 칠량농공단지 오수관로 신설공사 일반해역이용협의용역 실시		‘22.4.21.		유미자 부군수 임준형 과 장 유금랑 팀 장 이재연 주무관
○ 칠량농공단지 실시계획 변경 용역 실시		‘22.4.21.		유미자 부군수 임준형 과 장 유금랑 팀 장 이재연 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	국가중요농업유산 보전관리사업
② 추진배경	농업유산을 복원·발굴하여 활용함으로써 농촌의 다원적 가치를 증진하고 지역공동체 활성화에 기여
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2021 ~ 2023년 ❍ 위 치 : 강진군 병영, 작천면 일원 ❍ 사 업 비 : 15억원(용역비 3.4억원) ❍ 내 용 : 국가중요농업유산 보전관리 및 자원조사, 다원적 자원 활용 등
④ 사업부서	친환경농업과	⑤ 담당자		송승언 과 장(농업5) 윤영준 차 장(농업6)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업	⑦ 사업기간		2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
○ '21년 농업유산발굴 및 보전관리지원사업 계획서 제출		21.06.22.	송승언 과 장 박병철 팀 장 윤영준 차 장
○ 국가중요농업유산 기본계획 수립용역 총괄 및 1차분 협상에 의한 계약 발주 의뢰		21.09.01	송승언 과 장 신기은 팀 장 윤영준 차 장
○ 국가중요농업유산 자원조사 및 기본계획 수립용역 협상대상자 선정 결과 알림		21.10.26	송승언 과 장 신기은 팀 장 윤영준 차 장
○ 국가중요농업유산 제16호 자원조사 및 다원적 활용사업 기본계획 수립용역 1차 사업비 집행계획		21.12.19.	송승언 과 장 신기은 팀 장 윤영준 차 장
○ 국가중요농업유산 제16호 자원조사 및 다원적 활용사업 기본계획 수립용역 2차 시행		22.01.12.	송승언 과 장 신기은 팀 장 윤영준 차 장

정책실명제 중점관리 대상사업 현황 목록

① 정책사업명	스마트그린도시사업
② 추진배경	❍ 강진읍 산업화로 탐진강 수질악화, 기후 변화 현상으로 생물다양성 감소는 물론 군민건강 저해 초래 ❍ 자연적·문화적·생태적 가치가 높은 지역을 장기적인 안목으로 환경을 보호하고, 그린·스마트 기술을 활용한 지역기반의 녹색전환을 촉진하여 탄소저감 이행 강화
③ 사업개요	❍ 사 업 비 : 158억원(국비 95, 도비 10, 군비 53) ❍ 사업위치 : 강진읍 남포리, 평동리, 목리 일원(생태공원일원) ❍ 사 업 량 : 생태수로, 악취저감숲, 쓰레기매립장리모델링, 도로경관개선, 마을 숲 조성 등 ❍ 사업기간 : 2021.1.1.~2022.12.31.(2년)
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자	황인준 과 장(농업5) 전 혁 주무관(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 공모사업 선정		‘20.12.28.	임창복 과장 최양진 팀장 정성철 주무관
❍ 사업실현 타당성 평가		‘21.1.~3.	임창복 과장 최양진 팀장 전 혁 주무관
❍ 기본 및 실시설계 계약		‘21.4.~6.	임창복 과장 최양진 팀장 전 혁 주무관
❍ 기본 및 실시설계 및 1차공사 추진 중 - 스마트그린도시 소생태계 조성사업 착공(‘22.01.18.)		‘21.7.1.~ ‘22.12.30.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 현황 목록

① 정책사업명	강진만 도시생태축 복원사업
② 추진배경	❍ 수변축과 산림녹지축의 연결로 미세먼지 등 환경문제에 대응 할 수 있는 능력을 높여 자연과 사람이 공존할 수 있는 공간 마련
③ 사업개요	❍ 사 업 비 : 60억원(국비 42, 군비 18) ❍ 사업위치 : 강진읍 남포리 생태공원일원 ❍ 사 업 량 : 지형, 식생, 생태숲, 생물서식처 기반마련 등 ❍ 사업기간 : 2022.01.01.~2024.12.30.(3년)
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자	황인준 과 장(농업5) 전 혁 주무관(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 공모사업 선정		‘21.10.01.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관
❍ 강진만 도시생태축 복원사업 사업추진 방식 협의(환경부)		‘22.03.11.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관
❍ 도시생태축복원사업 사업계획 변경 승인		‘22.05.03.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관
❍ 강진만 도시생태축 복원사업 기본 및 실시설계용역 발주 추진 중		‘22.05.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 현황 목록

① 정책사업명	강진만 생태탐방학습홍보관 조성사업(강진만 생태클러스터 조성사업)
② 추진배경	❍ 강진만 생태공원 내 생태홍보 및 체험시설 부재 ❍ 생태관광 활성화를 통한 지역경제 활성화 연계
③ 사업개요	❍ 사 업 비 : 40억원(도비 21.85, 군비 18.15) ❍ 사업위치 : 강진읍 남포리 일원(강진만 일원) ❍ 사 업 량 : 생태탐방학습실 및 생태홍보관 등 생태전망실 등 ❍ 사업기간 : 2018.01.01.~2022.06.30.(4년)
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자	황인준 과 장(농업5) 전 혁 주무관(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진만 생태탐방체험관 조성사업 건축설계 제안공모 추진		‘21.01.01.	임창복 과장 최양진 팀장 전 혁 주무관
❍ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축설계계약		‘21.06.28.	임창복 과장 최양진 팀장 전 혁 주무관
❍ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축설계 용역시행 및 전시체험시설 계약추진		‘21.08.23.	임창복 과장 동영국 팀장 정성철 주무관
❍ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축 설계 및 공사착수		‘20.12.8.	임창복 과장 최양진 팀장 정성철 주무관
❍ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축 기초공사추진		‘21.1.1.~6.30.	임창복 과장 최양진 팀장 전혁 주무관
❍ 강진만 생태탐방학습홍보관 건축 골조완료 및 내부공사 추진 중		‘21.7.1.~ ’22.6.30.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 현황 목록

① 정책사업명	강진만 생태체험관조성사업
② 추진배경	❍ 강진만 생태공원 내 생태체험시설 부재 ❍ 생태체험교육 활성화를 통한 지역경제 활성화 연계
③ 사업개요	❍ 사 업 비 : 92억원(도비 41.8, 군비 50.2) ❍ 사업위치 : 강진읍 남포리 일원(강진만 일원) ❍ 사 업 량 : 생태체험관 및 편익시설 등 ❍ 사업기간 : 2021.01.01.~2023.12.30.(3년)
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자	황인준 과 장(농업5) 전 혁 주무관(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진만 생태탐방체험관 조성사업 건축설계 제안공모 추진		‘21.01.01.	임창복 과장 최양진 팀장 전 혁 주무관
❍ 강진만 생태체험관 조성사업건축설계계약		‘21.06.28.	임창복 과장 최양진 팀장 전 혁 주무관
❍ 강진만 생태체험관 조성사업 건축설계 용역시행 및 전시체험시설 계약추진		‘21.08.23.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관
❍ 강진만 생태체험관 조성사업 건축설계 완료 및 전시체험시설 설계추진 중		‘21.09.01. ‘22. 05.	황인준 과장 오명종 팀장 전혁 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	환경정화센터 소각시설 설치 사업
② 추진배경	생활쓰레기를 효율적으로 처리하고 환경 오염을 예방하기 위함
③ 사업개요	❍ 사업위치 : 강진읍 남당로 97-73 ❍ 사 업 비 : 89억 원(국비 26.7 , 군비 62.3) ❍ 사업규모 : 20톤/일(스토커 방식)
④ 사업부서	환경축산과		⑤ 담당자		황인준 과 장(행정5) 차혜영 차 장(환경6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2018년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 소각시설 기술 진단		‘18. 8. 21.		이용현 과 장 양연숙 팀 장 윤상우 차 장
❍ 국고 예산지원 사전협의 및 확정		‘19. 3. 31.		이용현 과 장 이계춘 팀 장 김미라 차 장
❍ 기본 및 실시설계 계약 의뢰		‘19. 12. 19.		임창복 과 장 윤상우 팀 장 김미라 차 장
❍ 기본 및 실시설계 착수		‘20. 5. 21.		임창복 과 장 윤상우 팀 장 김미라 차 장
❍ 소각시설 및 부대시설 구매 의뢰		‘20. 12. 16.		임창복 과 장 윤상우 팀 장 이춘재 차 장
❍ 우선협상대상자 선정에 따른 계약추진		‘21. 4. 16.		임창복 과 장 윤상우 팀 장 이춘재 차 장
❍ 소각시설 설치사업 설계의 경제성 검토 용역 완료		‘21. 12. 16.		황인준 과 장 이춘재 팀 장 차혜영 차 장
❍ 환경정화센터 소각시설 설치 기본 및 실시설계 용역 중지		‘22. 03. 18.		황인준 과 장 이춘재 팀 장 차혜영 차 장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	환경정화센터 2단계 매립시설 조성 사업
② 추진배경	환경정화센터를 연중 안정적으로 운영하고 위생적으로 관리하기 위함.
③ 사업개요	❍ 사업위치 : 강진읍 남당로 97-73 ❍ 사 업 비 : 57.81억원(국비 15.12 , 군비 42.69) ❍ 사업규모 : 면적 7,125㎡ / 용량 42,750㎥
④ 사업부서	환경축산과	⑤ 담당자		황인준 과 장(농업5) 이춘재 팀 장(환경6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2017년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 매립장 확보사업 타당성 조사 및 기본계획		‘17. 10. 26.	이용현 과 장 양연숙 팀 장
❍ 국고예산지원 사전협의 및 확정		‘18. 3. 31.	이용현 과 장 양연숙 팀 장
❍ 기본 및 실시설계 완료		‘19. 12. 2.	임창복 과 장 윤상우 팀 장 김미라 차 장
❍ 전남도 계약심사 및 공사계약 의뢰		‘20. 1 .7.	임창복 과 장 윤상우 팀 장 김미라 차 장
❍ 공사발주 및 착공		‘20. 3. 25.	임창복 과 장 윤상우 팀 장 김미라 차 장
❍ 공사준공		‘22. 2. 09.	황인준 과 장 이춘재 팀 장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2050 탄소중립을 위한 강진군 기후변화 대응계획 수립용역
② 추진배경	○ 2050 탄소중립을 목표로 강진군 특성을 반영한 온실가스 감축 및 기후변화 적응에 대한 강진군 차원의 기후변화대응계획 수립 필요
③ 사업개요	○ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2023. 2. ○ 사 업 비 : 1억 원(국비 70, 군비 30) ○ 사업내용 : 2050 강진군 탄소중립 전략 비전 및 기본방향 도출, 로드맵 수립, 연차별 추진계획 마련, 성과관리, 탄소중립 거버넌스 구축 및 운영 등
④ 사업부서	환경축산과		⑤ 담당자		황인준 과장(농업5) 이혜민 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5천만 원 이상 용역사업		⑦ 사업기간		2022. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
○ 협상에 의한 계약 타당성 검토 요청		‘22.3.11.		황인준 과장 오명종 팀장 이혜민 주무관
○ 2050 탄소중립을 위한 강진군 기후변화 대응계획 수립용역 협상에 의한 계약 추진계획		‘22.3.31.		유미자 부군수 황인준 과장 오명종 팀장 이혜민 주무관
○ 계약 발주 의뢰		‘22.4.1.		황인준 과장 오명종 팀장 이혜민 주무관
○ 제안서 예비평가위원 모집 ※ 제안서 평가 : 5. 13.(금)		‘22.4.18.		황인준 과장 오명종 팀장 이혜민 주무관
○ 제안서 평가결과 공고		‘22.5.16		황인준 과장 오명종 팀장 이혜민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	지방정원 조성사업
② 추진배경	강진만 갈대숲 및 생태공원 등 주변 관광자원과 연계한 지방정원 조성
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 남포리 일원 ❍ 사업량 : 8.14ha ❍ 사업비 : 90억 원(균특 45, 도비 4.5, 군비 40.5)
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 황현진 주무관(녹지6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018. ~ 2023.
<그간 주요 추진내용>
❍ 지방정원 조성사업 설계용역 제안 공모 추진		’18. 4. 6.	안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 송방선 산림경영팀장 양혜철 주무관
❍ 강진 지방정원 군관리계획(용도지역, 공원) 결정(변경) 전략 및 소규모 환경영향평가 용역 추진		’18. 10. 18.	이승옥 강진군수 안병옥 부군수 김영기 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최보길 주무관
❍ 생태·자연도 일부 수정·보완 ※ 전국 생태·자연도 일부 수정·보완 고시 (환경부고시 제2020-51호)		’20. 3. 17.	전재영 해양산림과장 김강훈 산림경영팀장 최준동 주무관
❍ 강진 군관리계획(용도지역, 유원지, 조성계획) 변경(안) 입안		’20. 9. 16.	전재영 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
❍ 농업진흥구역 해제 농림부 협의 완료 ❍ 군 계획시설 실시계획인가		’21. 7. 6. ’21. 11. 18	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
❍ 실시설계 계약심사 ❍ 사업발주 및 계약		’21. 11. 26 ’21. 12. 20	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
❍ 사업추진 - 가설사무소, 가설휀스 설치 완료 - 농로, 콘크리트 철거 및 폐기물 처리 - 석고비료, 골재 포설, - 토사운반 및 성토작업 중		’22. 01. ~ 06.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 황현진 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	보은산 테마공원(V-랜드) 조성 사업
② 추진배경	자연친화적 공원 조성으로 군민 삶의 질 향상
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 남성리 보은산 일원 ❍ 사업내용 : 수국단지, 유리온실, 생태연못, 산책로 ❍ 사 업 비 : 43억 원(균특 18, 군비 25)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자		임창복 과 장(행정5) 양혜철 차 장(녹지6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2015. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
❍ 2015년도 농어촌 테마공원 조성사업 대상지 확정 통보(전라남도)		‘14. 2. 5.		김영기 해양산림과장 송방선 산림관리팀장 최보길 주무관
❍ 군 관리계획 결정(변경) 고시		‘17. 11. 27.		김영기 해양산림과장 김강훈 산림관리팀장 최준동 주무관
❍ 기본계획 승인		‘18. 7. 26.		김영기 해양산림과장 김강훈 산림관리팀장 최준동 주무관
❍ 시행계획 승인·고시		‘19. 11. 26.		서은수 농축산식품국장(전라남도) 이귀동 농업정책과장(전라남도) 김재인 농업기반팀장(전라남도) 윤민우 주무관(전라남도) 전재영 해양산림과장 맹주재 산림관리팀장 양혜철 차 장
❍ 보은산 테마공원 조성사업 착공		‘20. 1. 3.		전재영 해양산림과장 맹주재 산림관리팀장 양혜철 차 장
○ 생태복원사업 추진 중(90%)		‘20. 1. 3. ~ 22. 12. 31.		임창복 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 양혜철 차 장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	목재친화도시 조성사업
② 추진배경	❍ 지역주민들을 위한 목재교육 프로그램 기반 조성으로 지속 가능한 목재문화 확산 ❍ 도시 내 탄소배출 저감 및 탄소저장 증진으로 탄소중립 도시 전환
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 동성리 일원 ❍ 사업비 : 50억 원(국비 25, 지방비 25) ❍ 사업내용 : 목재친화거리 및 목재체험센터 조성
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 최보길 주무관(녹지6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2022. ~ 2025.
<그간 주요 추진내용>
○ 목재친화도시 조성사업 사업계획 수립 용역 추진		‘21. 9. 8.	이상심 부군수 이준범 기획홍보실장 김국혼 세무회계과장 임창복 해양산림과장 김영실 예산팀장 이상현 경리팀장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
○ 공모사업 선정		‘22. 3. 14.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최보길 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	생활밀착형 숲 조성사업
② 추진배경	국·공유지 다중이용시설 주변에 군민에게 건강한 생활환경과 여가활용공간 제공
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진 종합운동장 일원 ❍ 사업량 : 8.14ha ❍ 사업비 : 5억 원(균특 2.5, 도비 0.25, 군비 2.25)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 황현진 주무관(녹지6)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2022. 1. ~ 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 생활밀착형 숲 조성사업 대상지 선정		‘21.09.10	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
○ 실시설계 용역 계약의뢰		‘22.01.04	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
○ 사업 계획 협의(3회)		‘22.01.17 ‘22.01.26 ‘22.02.09	스포츠산업단 강진체육회
○ 도시숲 등 조성 및 관리 위원회 심의		‘22.02.28	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
○ 설계 심사		‘22.04.08	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
○ 계약 및 착공		‘22.04.06	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	칠량 봉황항 어촌뉴딜300사업
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 어촌 정주여건 개선에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 칠량면 봉황리 봉황항 일원(봉황마을) ❍ 사업량 봉황항 정비, 부잔교 설치, 덕동마을 선착장 정비, 안전 시설물 설치, 덕동선착장 인양기 설치, 물양장 확장, 봉황항 공동작업장 및 휴게시설 조성, 어장 진입로 조성 등 ❍ 사업비 : 58억 원(국비 41, 도비 5, 군비 12)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과 장(행정5) 차형태 차 장(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2021~2023
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정		‘20.12.14	이승옥 강진군수 이상심 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 위·수탁협약 체결 한국어촌어항공단		‘21.02.01	이승옥 강진군수 이상심 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘21.02.19	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 실시설계 용역 착수 ㈜세광종합기술단 외 4		‘21.07.26	임창복 해양산림과장 문진희 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 기본계획 고시		‘21.12.22	임창복 해양산림과장 문진희 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 건축설계 용역 착수 우림건축사사무소		‘22.01.25	임창복 해양산림과장 강승원 해양개발팀장 차형태 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2022년 산림유역관리사업
② 추진배경	재해방지, 수원함양 등 다기능적 복합관리 사방사업
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 칠량면 삼흥리 산1-2 일원 ❍ 사업내용 : 사방댐 1개소, 계류보전 0.5km, 경관조성 1개소 ❍ 사 업 비 : 1,1억 원(국비 70%, 도비 15%, 군비 15%)
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자		임창복 과 장(행정5) 최수빈 주무관(녹지9)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 타당성평가 완료		‘21. 8. 4.	임창복 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 최수빈 주무관
○ 실시설계 용역 발주		‘22. 1. 26.	임창복 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 최수빈 주무관
○ 실시설계 도 계약심사 완료		‘21. 5. 10.	임창복 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 최수빈 주무관
○ 계약의뢰		‘22. 5. 13.	임창복 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 최수빈 주무관
○ 지장목 제거 및 기초터파기 공사		‘22. 5. ~ 22. 6.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	미세먼지 차단 숲 조성
② 추진배경	칠량농공단지 내 미세먼지 저감 및 고사목 보식 필요
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 칠량면 송로리 1184 일원 ❍ 사업량 : 1ha ❍ 사업비 : 10억 원(기금 50%, 군비 50%)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 장운기 주무관(녹지9)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2022. 1. ~ 11.
<그간 주요 추진내용>
○ 관련 부서 협의 - 적치물 처리 요청		22. 1. 26.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 장운기 주무관
○ 도시림 등의 조성 및 관리 심의위원회 심의 개최 - 식재 수종 선정 협의		22. 2. 28.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 장운기 주무관
○ 도 설계 자문 진행 - 설계 초안 검토 및 식재관련 사항 자문		22. 4. 12.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 장운기 주무관
○ 도 계약심사 사전 협의 - 제경비 산출 비율 수정 및 일부 자재 관급 지정		22. 5. 3.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 장운기 주무관
○ 실시설계 용역 준공		22. 5. 9.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 장운기 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가우도권역 어촌뉴딜300사업
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 어촌 정주여건 개선에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 대구면 저두리 하저항 및 도암면 신기리 가우도항 일원 ❍ 사업량 방파제 정비, 안전난간 설치, 어구어망보관창고, 공동작업장 리모델링, 해수소통구 설치, 공동양식장 진입로 조성, 캠핑장 조성, 낚시공원 추가 증설 등 ❍ 사업비 : 89억 원(국비 62, 도비 8, 군비 19)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 차형태 차장(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2021~2023
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정		‘20.12.14	이승옥 강진군수 이상심 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 위·수탁협약 체결 한국농어촌공사		‘21.02.01	이승옥 강진군수 이상심 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘21.02.19	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 실시설계 용역 착수 ㈜한국종합기술		‘21.07.01	임창복 해양산림과장 문진희 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 기본계획 고시		‘21.12.22	임창복 해양산림과장 문진희 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 특화사업 세부설계 용역 ㈜원진엔지니어링건축사사무소		‘22.01.24	임창복 해양산림과장 강승원 해양개발팀장 차형태 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마량항 정비사업
② 추진배경	마량항의 부족한 어항시설을 확보하고 수산업 기능외에 지역특성을 고려한 어촌관광, 수산물유통 등 미래지향적인 어항시설 건설
③ 사업개요	❍ 위 치 : 마량면 미항로 마량항 일원 ❍ 사업량 - 접안시설 보수 : 물양장 보수 L=457m - 기존시설 보수 : 상방파제 보수, 배후시설 정비 등 ❍ 사업비 : 243억 원(국비 243)
④ 사업부서	목포지방해양수산청		⑤ 담당자	김광수 과 장(시설5) 서경석 주무관(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2017~2022
<그간 주요 추진내용>
○ 국가어항 지정		‘71.12.21
○ 기본시설 완공		‘93.12.
○ 실시설계 완료		‘16.05.20	김광수 어항건설과장 반재남 주무관 임정렬 주무관
○ 공사 착공		‘17.05.31	김광수 어항건설과장 반재남 주무관 임정렬 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도암 망호항 어촌뉴딜300사업
② 추진배경	해양관광 활성화 기반 조성 및 어촌 정주여건 개선에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 도암면 신기리 일원(망호마을) ❍ 사업량 - 방파제 정비, 낚시어선 거점항 조성, 선착장 및 주차장 조성, 해안둘레길 조성, 해안편의및안전시설 설치 등 ❍ 사업비 : 99억 원(국비 69, 도비 9, 군비 21)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 차형태 차장(시설6)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2021~2023
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정		‘19.12.18	이승옥 강진군수 이건섭 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 김재성 주무관
○ 지방재정투자심사 완료		‘20.01.17	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 위·수탁협약 체결 한국농어촌공사		‘20.04.24	이승옥 강진군수 이건섭 부군수 전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 기본계획 고시		‘20.12.08	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 생활SOC분야 토목공사 착공		‘21.06.28	전재영 해양산림과장 이영일 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 시행계획 고시		‘21.12.22	임창복 해양산림과장 문진희 해양개발팀장 차형태 주무관
○ 위탁 보조금 교부결정		‘22.03.30	이승옥 군수 유미자 부군수 이준범 기획홍보실장 김진관 예산팀장 김국혼 세무회계과장 이상현 경리팀장 임창복 해양산림과장 강승원 해양개발팀장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가우도 섬숲 생태복원사업
② 추진배경	인위적, 자연적 훼손된 생태계를 회복하여 가우도의 본래 아름다운 해안경관을 회복하고 산림환경을 유지하고자 함
③ 사업개요	❍ 위 치 : 가우도 일원(도암면 신기리 일원) ❍ 사업면적 : 7ha ❍ 사업내용 : 생태복원을 위한 향토 및 복원수종 식재(어린 수목) ❍ 사 업 비 : 7.6억 원(국비 5.3, 도비 0.7, 군비 1.6)
④ 사업부서	해양산림과	⑤ 담당자		임창복 과 장(행정5) 손 균 주무관(녹지7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2021. ~ 2022.
<그간 주요 추진내용>
○ 타당성평가 완료		‘20. 11. 24.	전재영 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 양혜철 차 장
○ 실시설계 용역 발주		‘21. 2. 8.	전재영 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 손 균 주무관
○ 생태복원사업 실시설계 컨설팅		‘21. 3. 25.	전재영 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 손 균 주무관
○ 생태복원사업 추진 중(75%)		‘21. 12. 10. ~ 22. 10. 5.	임창복 해양산림과장 윤보현 산림관리팀장 손 균 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	주작산 자연휴양림 보완사업
② 추진배경	❍ 다양화되는 이용자 수요를 충족할 수 있는 산림 휴양시설 확충 ❍ 청정지역 이미지 마케팅과 시설 및 서비스 품질향상으로 방문객 확대유도
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 신전면 수양리 산65-5 ❍ 사업내용 - 숲속의 집 신축 : 10동(10평 내외) - 기반시설 : 전기공사, 오수처리시설 1개소, 물탱크 2개소 등 - 노후 객실 보완 및 리모델링, 연못 조성, 산림욕장 조성 등 ❍ 총사업비 : 45억 원(균특 25, 도비 6.75, 군비 15.75)
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 최준동 주무관(녹지7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	22. 1. ~ 23. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 자체 지방재정투자심사		‘22. 2. 25.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관
○ 숲속의 집 신축 및 보수공사 실시설계 용역 계약		‘22. 2. 22. ~ ‘22. 8.	임창복 해양산림과장 맹주재 산림경영팀장 최준동 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진만 패류감소 원인조사 용역
② 추진배경	각종사업(간척매립, 준설, 댐 건설 등) 및 자연환경 변화 등에 따른 패류 생산량 감소 발생
③ 사업개요	❍ 용역기간 : 2018.1. ~ 2022.7. ❍ 총사업비 : 8억 원 ❍ 용역내용 : 패류양식어업 자원 및 피해정도 조사, 생물 검정실험, 해수유동·부유사 확산등 수치모형 등
④ 사업부서	해양산림과		⑤ 담당자	임창복 과장(행정5) 박남철 팀장(수산6)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업		⑦ 사업기간	2017년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 1차 발주		‘17.12.21	김영기 과장 황상운 팀장 박남철 주무관
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 1차 발주 용역 준공		‘18.11.30	김영기 과장 이승일 팀장
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 2차 발주		‘19.12.20	전재영 과장 이승일 팀장
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 2차 발주 용역 준공		‘20.4.24	전재영 과장 이승일 팀장
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 3차 발주		‘20.7.8	이영일 팀장 이승일 팀장
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 추가조사 요청		‘21.10.21	임창복 과장 박남철 팀장
○ 강진만 패류감소 원인조사 용역 중지요청 승인(완료 기한‘22.7.5)		‘22.3.7	임창복 과장 박남철 팀장

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	계획공모형 지역관광개발사업
② 추진배경	지역 주도의 관광개발 사업 발굴·추진을 통한 지역 수요 맞춤형 관광 활성화 여건 마련
③ 사업개요	❍ 사업비 : 120억 원(국 60, 도 18, 군 42) - 2022년 : 33억 원(국 16.5, 도 4.95, 군 11.55) ❍ 사업내용 : 여행자 라운지, 숙박 체험시설 등 관광객 웰컴센터 구축
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자	김영빈 과 장(행정5) 양혜은 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2020 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>
○ 계획공모형 지역관광개발 공모사업 최종 선정		‘20. 03. 18.	김학동 과장 김영빈 팀장 성홍식 주무관
○ 강진군 계획공모형 지역관광개발사업 자문단 구성		‘20. 9. 7.	이상심 부군수 김영빈 과장 이재희 팀장 유지숙 주무관
○ 강진군 계획공모형 지역관광개발사업 기본계획 수립 용역 준공		‘20. 9. 24. ~‘21. 9. 30.	김영빈 과장 이재희 팀장 유지숙 주무관(착공) 서준영 주무관(준공)
○ 잇 트립 추진		‘21. 11. 24.	이준범 기획홍보실장 김영빈 과장 이재희 팀장 서준영 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진의 몽마르뜨 언덕 조성
② 추진배경	강진의 주요 관광지인 영랑생가에서 사의재를 이르는 구간을 관광명소로 조성하여 관광소득 증대 및 지역경제 활성화 도모
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2018 ~ 2023. ❍ 위 치 : 강진읍 남성리 ~ 동성리(영랑생가 ~ 사의재 구간) ❍ 총사업비 : 28억원 ❍ 주요내용 : 조망언덕 조성, 숲속마켓 조성, 정각주변 정비공사, 조형물 설치 등
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자		김영빈 과 장(행정5) 정동진 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2018년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 기본계획 용역 추진		‘18.09.11		문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김동남
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 기본계획 용역 추진		‘19.07.08		부군수 이건섭 문화관광과장 최치현 문화유적팀장 김선재 주무관 정창옥
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 조망언덕 사업 추진		‘19.12.18		군수 이승옥 부군수 이건섭 문화관광과장 최치현 문화유적팀장 김선재 주무관 이재연
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 조성사업 특화계획 학술용역 추진		‘20.03.02		문화관광과장 최치현 문화유적팀장 김선재 주무관 이재연
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 숲속마켓 조성공사 추진		‘20.09.07		군수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 조망언덕 사업 준공		‘20.11.06		관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 숲속마켓 경관조명 설치용역 추진		‘21.01.19		관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 정각주변 정비공사 실시설계 용역 추진		‘21.02.01		관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 숲속마켓 경관조명 설치 공사 추진		‘21.03.20		부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 정각주변 정비공사 추진		‘21.03.20		부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 조형물 제작 설치 계약심사		‘21.04.16		관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 조형물 제작 설치 추진		‘21.04.28		군수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 김정모
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 숲속마켓 경관조명 설치 공사 준공		‘21.06.28		관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 서영권
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 정각주변 정비공사 준공		‘21.06.28		관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 서영권
❍ 몽마르뜨언덕 주변정비 및 초화류 식재공사 추진		‘21.09.01		관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 강진군 몽마르뜨언덕 조각공원 조형물 제작 설치 계약심사		‘22.03.23		관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 강진군 몽마르뜨언덕 조각공원 조형물 제작 설치 추진		‘22.04.04		군수 이승옥 부군수 유미자 관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 강진의 몽마르뜨 언덕 조형물 제작 설치 준공		‘22.04.30		관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 몽마르뜨언덕 공원조성 식재공사 추진		‘22.05.04 ~06.07.		관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진만 노을경관 조성사업
② 추진배경	❍ 강진만 주변에 산재해 있는 백련사, 고려청자요지, 가우도 출렁다리 등과 연계한 생태관광 자원 개발 ❍ 생태관광 자원을 활용한 관광인프라구축, 고부가가치화
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2018. ~ 2023. ❍ 위 치 : 강진읍 남포리 ~ 칠량면 영복리 일원 ❍ 총사업비 : 38억원(국비 20, 군비 18) ❍ 주요내용 : 해안산책로, 편의시설 등 조성
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자		김영빈 과 장(행정5) 정동진 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2018년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진만 노을경관 자원화사업 기본계획 수립 용역 추진		‘17.01.03	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 위길복 주무관 이재형
❍ 강진만 노을경관 조성사업 실시설계 용역 추진		‘18.04.13	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 홍양식 주무관 이재형
❍ 강진만 노을경관 조성사업 공사 계약 추진(총괄, 1차분)		‘18.11.16	군 수 이승옥 부군수 안병옥 관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 이재형
❍ 강진만 노을경관 조성사업 공사 계약 추진(2차분)		‘19.03.14	관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 강진만 노을경관 조성사업 1차분 준공		‘19.04.09	관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 강진만 노을경관 조성사업 2차분 준공		‘19.06.18	관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 2020 강진만 노을경관 조성사업 실시설계 용역 추진		‘19.12.05	관광과장 김학동 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 2020 강진만 노을경관 조성사업 공사 계약 추진		‘20.03.30	군 수 이승옥 부군수 이건섭 관광과장 김학동 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진만 노을경관 해안산책로 조성공사 실시설계 용역 추진		‘20.11.18	부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 강진만 노을경관 해안산책로 일반해역이용협의 용역 추진		‘20.11.26	부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 김정모
❍ 칠량면 영복리 해안산책로 조성공사 실시설계 용역 추진		‘21.03.18	관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 김정모
❍ 2020 강진만 노을경관 조성사업 공사 준공		‘21.04.06	관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 김정모
❍ 칠량면 영복리 해안산책로 조성공사 실시설계 용역 준공		‘21.04.14	관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 김정모
❍ 강진만 노을경관 해안산책로 일반해역이용협의 용역 준공		‘21.10.20	관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 2022년 강진만 노을경관 조성사업 계약심사 추진		‘21.11.16	관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 2022년 강진만 노을경관 조성사업 추진		‘21.11.30	군수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진
❍ 2022년 강진만 노을경관 조성사업 2차분 추진		‘22.02.24	부군수 유미자관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 정동진

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 삼십리 벚꽃길 조성사업
② 추진배경	❍ 강진만 주변에 산재해 있는 백련사, 고려청자요지, 가우도 출렁다리 등과 연계한 생태관광 자원 개발 ❍ 생태관광 자원을 활용한 관광인프라구축, 고부가가치화
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2018. 1. ~ 2023. 12. ❍ 위 치 : 강진군 군동면 호계리~작천면 군자리 ❍ 총사업비 : 26억원(도비 13, 군비 13) ❍ 주요내용 : 주차장, 전망대, 쉼터, 조명등, 공연장 설치
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자		김영빈 과장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2018년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 기본계획 수립 용역 추진		‘17.07.24	문화관광과장 이준범 관광개발팀장 유효석 주무관 이재형
❍ 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 실시설계 용역 추진		‘18.02.27	부군수 안병옥 문화관광과장 이준범 관광개발팀장 홍양식 주무관 이재형
❍ 2018년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 추진		‘18.09.11 ~‘19.05.08	군 수 이승옥 부군수 안병옥 관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 이재형
❍ 2020년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 실시설계 용역 추진		‘19.12.24	관광과장 김학동 관광개발팀장 홍양식 주무관 이재형
❍ 2020년 강진 삼십리 벚꽃길 조성사업 도 계약심사		‘20.04.09	관광과장 김학동 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 2020년 강진 삼십리 벚꽃길 산책로 개설공사		‘20.04.20	군 수 이승옥 부군수 이건섭 관광과장 김학동 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 강진 삼십리 벚꽃길 경관조명 설치공사		‘21.02.02	군 수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 서영권
❍ 강진 삼십리 벚꽃길 벚꽃공원 조성공사 실시설계 용역		‘21.08.31	관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 서영권
❍ 강진 삼십리 벚꽃길 벚꽃공원 조성공사 및 폐기물처리 용역 시행		‘21.10.20 ~‘22.3.11.	부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 서영권

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대구 저두지구 관광편의시설 조성
② 추진배경	가우도 일원 관광객 증가에 따른 인근 저두지역의 체계적 개발을 통한 방문객 편의 제공과 관광명소화 추진
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 대구면 저두리 일원 ❍ 총사업비 : 46.9억 원(균특 23.45, 군비 23.45) ❍ 주요내용 : 38,426.2㎡ ‣ 주차장, 도로, 광장, 공원, 편의시설 조성 등
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자	김영빈 과 장(행정5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2022년 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>
○ 관광휴양형 지구단위계획 결정 고시		‘21.5.20.	이승옥 군수 이상심 부군수 김영빈 과장 신경열 팀장 김재성 주무관
○ 편입토지 보상협의		‘21.6.16. ~	이승옥 군수 이상심 부군수 김영빈 과장 신경열 팀장 김재성 주무관
○ 실시설계 용역 시행		‘22.2.14.	이승옥 군수 유미자 부군수 김국혼 세무회계과장 이상현 경리팀장 김영빈 과장 신경열 팀장 김재성 주무관
○ 소규모환경영향평가 용역 시행		‘22.3.15. ~22.9.10.	유미자 부군수 김국혼 세무회계과장 이상현 경리팀장 김영빈 과장 신경열 팀장 김재성 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	분홍나루 노을공원 관광자원화사업
② 추진배경	❍ 넓은 바다와 갯벗을 바라볼 수 있는 경관이 뛰어난 곳으로 전시관 설치 및 특화된 관광 콘텐츠를 개발하여 지역 관광산업 및 지역경제 활성화
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12. ❍ 위 치 : 강진군 대구면 사당리 618-18일원 ❍ 총사업비 : 34억원(도비 17, 군비 17) ❍ 사업내용 : 노을전시관, 특산품판매장, 역사문화홍보관, 스카이워크 등
④ 사업부서	관광과	⑤ 담당자		김영빈 과장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2020년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 분홍나루 노을공원 관광자원화사업 기본계획 수립		‘19.03.08	관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 분홍나루 노을공원 관광자원화사업 전남도 지방재정투자심사 의결		‘19.06.27	관광과장 허경자 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 분홍나루 노을공원 관광자원화사업 실시설계 용역 추진		‘20.02.06	부군수 이건섭 관광과장 김학동 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 분홍나루 노을전시관 건립 전시물 설계 및 제작설치 협상에의한 계약 추진		‘20.09.21	군 수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 홍양식 주무관 서영권
❍ 분홍나루 노을전시관 건립공사 시행		‘21.08.20	군 수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 서영권
❍ 분홍나루 노을전시관 폐기물 철거공사 및 처리용역 시행		‘21.10.25	관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 서영권

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마량 횟집거리 조성사업
② 추진배경	□ 상징조형물 설치 등 음식특화거리 조성으로 관광객 유치 및 일대 상권 활성화
③ 사업개요	□ 사업기간 : 2022년 □ 위 치 : 마량항 일원(유림농수산 ~ 정든횟집 / 620m) □ 조성내용 : 상징조형물, 포토존, 진출입 안내판, 편의쉼터 등 설치 □ 사 업 비 : 6.4억 원
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자		김영빈 과 장(행정5) 최창준 주무관(보건7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 전남도 남도음식거리 조성 공모 신청 ※ 사업계획 용역 : 2021.11.01.~11.10.		‘21.11.10		김영빈 과 장 한준호 팀 장 최창준 주무관
○ 전남도 남도음식거리 조성 공모 선정		‘21.11.25		김영빈 과 장 한준호 팀 장 최창준 주무관
○ 「횟집 거리」디자인 및 실시 설계 용역 계약 - 무진주디자인연구소 / 20백만원		‘22.02.14.		김영빈 과 장 한준호 팀 장 최창준 주무관
○ 「횟집 거리」디자인 기본 및 실시 설계 용역 추진(추진 중)		‘22.02.17. ~ 07.16.		김영빈 과 장 한준호 팀 장 최창준 주무관 신상식 대 표(용역) 정상훈 팀 장(용역)

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가우도 도서종합개발사업
② 추진배경	낙후된 도서지역의 생활, 생산, 소득 복지시설의 정비 및 확충으로 도서주민들의 소득증대와 복지향상 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 일원 ❍ 총사업비 : 22억 원(균특 22) ❍ 주요내용 : 둘레길 조성, 공중화장실, 하수처리시설 방파제 정비 등
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자		김영빈 과 장(행정5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2018년 ~ 2027년
<그간 주요 추진내용>
○ 도서개발 둘레길 조성사업 시행		‘19.7.3.		이건섭 부군수 김국혼 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 오광록 주무관
○ 소규모하수처리시설 설치공사 시행		‘19.9.26.		이승옥 군수 이건섭 부군수 김국혼 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 오광록 주무관
○ 공중화장실 설치공사 시행		‘21.1.7.		이상심 부군수 김국혼 세무회계과장 신기은 경리팀장 김영빈 과장 신경열 팀장 김재성 주무관
○ 2022년 둘레길 조성 실시설계 용역 시행		‘22.1.7. ~3.28.		김영빈 과장 김국혼 세무회계과장 신기은 경리팀장 신경열 팀장 김재성 주무관
○ 가우도 도서개발 둘레길 조성사업		‘22.3.31. ~6.4.		유미자 부군수 김영빈 과장 김국혼 세무회계과장 신기은 경리팀장 신경열 팀장 김재성 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	가우도 향기의 섬 조성사업
② 추진배경	강진만의 생태환경과 천혜의 자연경관을 조망할 수 있는 기반 조성으로 건강 여가문화에 맞는 힐링 섬으로 명소화 추진
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 도암면 신기리 일원 ❍ 총사업비 : 38억 원(균특 19, 군비 19) ❍ 주요내용 : 생태탐방로, 생태공원, 수목식재 등
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자	김영빈 과 장(행정5) 김재성 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2016년 ~ 2024년
<그간 주요 추진내용>
○ 가우도 생태공원 조성공사 시행		‘16.9.9.	박수철 부군수 마국진 세무회계과장 김석재 경리팀장 이준범 과장 위길복 팀장 전 혁 주무관
○ 가우도 향기의 섬 조성사업 시행		‘17.2.23.	안병옥 부군수 마국진 세무회계과장 김석재 경리팀장 이준범 과장 위길복 팀장 오광록 주무관
○ 가우도 향기의 섬 쉼터 조성사업 시행		‘18.11.13.	이승옥 군수 윤영갑 기획홍보실장 최종열 세무회계과장 신기은 경리팀장 허경자 과장 이명식 팀장 김 현 주무관
○ 가우도 향기의 길 조성사업 시행		‘19.11.6.	이건섭 부군수 김국혼 세무회계과장 신기은 경리팀장 김학동 과장 윤재필 팀장 오광록 주무관
○ 가우도 향기의 길 조성사업 실시설계 용역 시행		‘22.1.17. ~5.23.	김영빈 과장 김국혼 세무회계과장 이상현 경리팀장 신경열 팀장 김재성 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	다산유적지 일원 애절양 공원 조성사업
② 추진배경	❍ 다산박물관 앞 유휴부지에 다산의 시를 주제로한 공원을 조성하여 지역민의 쉼터 제공과 체류형 관광거점으로 조성
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 1. ~ 2023. 12. ❍ 위 치 : 강진군 도암면 만덕리 105일원 ❍ 총사업비 : 20억원(국비 20) ❍ 사업내용 : 애절양공원 조성, 조형물설치, 탐방로 조성
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자	김영빈 과장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2020년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 국토부 지역수요맞춤지원사업 공모선정		‘20.7.10.	기획홍보실장 입채용 정책개발팀장 임진모
❍ 다산 애절양공원 조성사업 지역개발사업 구역 지정 및 실시설계 용역(1차분)		‘21.02.08	군 수 이승옥 부군수 이상심 관광과장 김영빈 관광개발팀장 박상함 주무관 서영권
❍ 다산 애절양공원 조성사업 지역개발사업 구역 지정 및 실시설계 용역(2차분)		22.5.17 ~‘22.9.21	부군수 유미자 세무회계과장 김국혼 경리팀장 이상현 관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 서영권

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 사초 펫동반 오토캠핑장 조성
② 추진배경	❍ 신전면 사초해변공원에 테마별 오토캠핑장을 조성하여 체류형 관광거점으로 조성
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2022 1. ~ 2023. 12. ❍ 위 치 : 강진군 신전면 사초해변공원 ❍ 총사업비 : 25억 원(도비 12.5 군비 12.5) ❍ 사업내용 : 캠핑장 및 편의시설 조성
④ 사업부서	관광과		⑤ 담당자	김영빈 과장(행정5) 서영권 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2022년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 사초 펫동반 오토캠핑장 조성사업 군관리계획 시설결정 및 실시설계용역 시행		‘22.3.3. ~ 8.29.	부군수 유미자 관광과장 김영빈 관광개발팀장 김근영 주무관 서영권

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	작은 영화관 조성사업
② 추진배경	영화관 개봉에 따른 다양한 문화 영상 서비스로 군민 문화생활 향유 기회 확대
③ 사업개요	❍ 사업위치 : 전남 강진군 강진읍 동성리 192-9번지 일원 ❍ 총사업비 : 10억 원(도비 6.5, 군비 3.5) ※ 설계비 0.4, 공사비 9.6 ❍ 사업내용 : 상영관, 영사실, 매표소, 매점, 사무실, 휴게소 등
④ 사업부서	문화예술과		⑤ 담당자	윤성일 과 장(행정5) 최경미 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2021년~2023년
<그간 주요 추진내용>
○ 강진군 작은영화관 인테리어 공사 실시설계 용역 시행		‘21.06.21 ~‘21.11.01	문화예술과장 윤성일 문예진흥팀장 오규미 주무관 양혜은
○ 강진군 작은영화관 실시설계 BF검사 완료 및 일상감사 요청		‘22.05.16	문화예술과장 윤성일 문예진흥팀장 오규미 주무관 최경미

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 하멜촌 조성사업
② 추진배경	역사 문화자원을 활용하여 역사 교육의 장과 가족 단위 체류형 휴양지로 조성하여 관광 활성화
③ 사업개요	❍ 사업위치 : 전남 강진군 강진읍 동성리 192-9번지 일원 ❍ 총사업비 : 96억 원(국비 58, 군비 38) ❍ 사업내용 : 하멜기념관 증축공사, 전시물 제작 설치, 공원조성 등
④ 사업부서	문화예술과		⑤ 담당자	윤성일 과 장(행정5) 오남원 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2013~2022
<그간 주요 추진내용>
○ 하멜촌 조성사업 1차분 준공		‘18.06.25	문화관광과장 이준범 관광진흥팀장 홍양식 학예연구사 이재연
○ 하멜촌 조성사업 건축공사 2차분 재입찰 및 계약		‘20.02.13	문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원
○ 하멜기념관 로비공사 및 내부 전시물 제작·설치 완료		‘21.03.12	문화예술과장 윤성일 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원
○ 하멜기념관 공원 조성 공사 착공		‘22.03.	문화예술과장 윤성일 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	전라 병영성 복원사업
② 추진배경	유구 및 문헌 등 고증에 의한 원형복원으로 역사문화 체험장을 조성하고, 하멜기념관·홍교·은행나무·한골목 등과 연계하여 관광 자원화 추진
③ 사업개요	❍ 사업위치 : 전남 강진군 병영면 성동리 일원(사적397호) ❍ 총사업비 : 590억 원(국비 413, 도비 59, 군비 118) ❍ 사업내용 : 성 내외부 발굴조사 및 정비, 성곽·문루 복원(4개문), 해자 정비, 성 주변 사적공원 조성 등
④ 사업부서	문화예술과		⑤ 담당자		윤성일 과 장(행정5) 오남원 주무관(행정7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		1998~2029
<그간 주요 추진내용>
○ 전라병영성 성곽(여장포함) 복원 완료 - 성곽(여장 포함) 1,060m, 문루(동서남북), 성 내부 유구 정비		‘15.12.		문화관광과장 이준범 문화예술팀장 김동남
○ 전라병영성 내부 발굴조사 및 해자 시·발굴조사 완료		‘20.3.		문화예술과장 최치현 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원
○ 전라병영성 긴급보수 설계용역 및 1·2차분 공사 완료		‘21.6.11.		문화예술과장 윤성일 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원
○ 고증조사 연구 및 설계 용역 - 객사(청심각) 미연희당 복원, 해자 정비 등		‘21.10.27.		문화예술과장 윤성일 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원
○ 강진 전라병영성 복원정비공사 의뢰		‘22.5.16.		문화예술과장 윤성일 문화유적팀장 김선제 주무관 오남원

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 도시재생 뉴딜사업
② 추진배경	지역 역사·문화 자원을 활용하여 낙후지역 활성화를 통한 강진읍 균형발전 및 지역경제 활성화
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 동성리·중앙로상가 일원 ❍ 사 업 비 : 155억원(균특 93, 도비 15.5, 군비 46.5) ❍ 사업규모 : 14.43ha ❍ 사업내용 : 노후주거지 정비, 공동체 활성화 및 주민역량 강화, 지역경쟁력 강화
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 진희순 주무관(행정 7) 김길수 주무관(행정 7) 배지민 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 01. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 도시재생 뉴딜사업 공모선정		‘18. 08.	황오연 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 도시재생 선도지역 지정		‘18. 12.	황오연 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 실현가능성 및 타당성평가		‘19. 03.	황오연 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 도시재생 특위심사		‘19. 04.	황오연 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 도시재생 사업 착수(추진중)		‘19. 04.	황오연 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 도시재생 사업 HW/SW 추진중		‘19. 04. ~ 현재	위길복 과 장 김태웅 팀 장 진희순 김길수 배지민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 도시재생 인정사업
② 추진배경	어린이·청소년·청년·성인·노인 등 생애 모든 주기의 계층을 아우르는 생활체육·여가 공간을 조성하여, 주민들의 여가생활과 지역공동체의 화합을 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 서성리 71 일원 ❍ 사 업 비 : 75억원(균특 45, 군비 30) ❍ 사업규모 : 4,459㎡ ❍ 사업내용 : 생애주기 맞춤형 복합생활체육 여가센터 조성
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 배지민 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020. 01. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 도시재생 인정사업 선정		‘19. 12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 도시재생 인정사업 계획 수립		‘20. 02.	백남태 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 도시재생 인정사업 사업승인		‘20. 05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 양순실 주무관
❍ 기본 계획수립 완료		‘20. 09.	백남태 과 장 김태웅 팀 장 정창욱 주무관
❍ 맘편한센터 조성 건축설계 공모		‘21.3.31. ~22.5.31.	위길복 과 장 김태웅 팀 장 배지민 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

①정책사업명	지역개발사업[지역수요맞춤지원사업]
②추진배경	강진군이 2021년 「지역개발 및 지원에 관한 법류」에 따른 지역경제를 활성화하고 국토의 균형있는 발전에 이바지함을 목적으로 공모한 “지역수요 맞춤형지원사업”공모사업 선정됨
③사업개요	❍ 사 업 명 : 지역수요맞춤지원사업[호계로 쏙, 행복 플랫폼] ❍ 위 치 : 군동면 호계리 1046-1 일원 외 9필지 ❍ 사 업 비 : 41.5억 원(국비 37, 군비 4.5) ❍ 사업내용 -보조사업 : 늘봄센터 조성사업(연면적 : 1,210㎡) -연계사업 : LH행복주택 100호(연면적 : 7,527㎡) 걷고싶은거리 조성(L=1,350m B=2m) 마을공방, 겔러리카페 조성(연면적 : 82.5㎡)
④사업부서	건설과(도시재생팀)		⑤담당자		위길복 과 장(시설 5) 박 훈 주무관(시설 9)
⑥선정기준	공모사업		⑦사업기간		2022 ~ 2024.(3년)
<그간 주요 추진내용>
○ 2021년 지역개발사업 공모선정		‘21. 8. 2.		박철원 과 장 김성수 팀 장 강병주 주무관
○ 2021년 지역개발사업 사업구역 지정 및 실시계획 용역계약		‘22. 4. 22.		위길복 과 장 김태웅 팀 장 박 훈 주무관 <협조자> 이상현 팀 장 <협조자> 김국혼 과 장
○ 늘봄센터 조성사업 기본·실 시설계 제안공모 추진 중		‘22. 4. ~		위길복 과 장 김태웅 팀 장 박 훈 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	병영면 도시재생 뉴딜사업
② 추진배경	역사·문화 자원을 활용한 지속가능한 정주여건 개선 및 생활SOC 조성을 통한 문화·복지 향상과 공동체 회복, 상권활성화
③ 사업개요	❍ 위 치 : 병영면 한골목길 21 일원 ❍ 사 업 비 : 141억원(균특 80, 도비 13.3, 군비 40, 기금 8) ❍ 사업규모 : 154,000㎡ ❍ 사업내용 : 주거환경개선, 생활SOC 조성, 공동체 활성화 및 주민역량 강화, 지역경쟁력 강화 등
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 김길수 주무관(행정 7) 박 훈 주무관(시설 9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022. 01. ~ 2025. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 도시재생 소규모재생사업 추진 및 뉴딜사업 활성화계획 수립		‘20. 01.	백남태 과 장 위길복 팀 장 정창욱 주무관
❍ 사업대상지 부지매입 및 상생협약 체결		‘21. 1.	백남태 과 장 김태웅 팀 장 김길수 주무관
❍ 국토부 실현가능성 및 타당성평가		‘21. 08.	백남태 과 장 김태웅 팀 장 김길수 주무관
❍ 국토부 도시재생 특위심사 승인		‘21. 09.	백남태 과 장 김태웅 팀 장 김길수 주무관
❍ 주민설명회 및 주민협의체 운영		‘21. 11.	백남태 과 장 김태웅 팀 장 김길수 주무관
❍ 도시재생 사업 HW/SW 추진중		‘22. 01. ~ 현재	위길복 과 장 김태웅 팀 장 김길수 주무관 박 훈 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	금강지구 대구획경지정리사업
② 추진배경	농로, 용ㆍ배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형 농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 군동면 라천리 외 5개리 ❍ 사 업 비 : 86억원(국비 69, 도비 3, 군비 14) ❍ 사업규모 : 335ha ❍ 사업내용 : 용수로 12,476m, 배수로 15,422m, 펌프장 2개소
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립 통보		‘17.10.23.	정석기 과 장 홍양식 팀 장 윤재필 주무관
❍ 금강지구 대구획경지정리사업 실시설계 완료		‘18.08.27.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 윤재필 주무관
❍ 금강지구 대구획경지정리사업 시행계획 승인		‘18.09.21.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관
❍ 금강지구 대구획경지정리사업 사업발주		‘18.10.26.	이승옥 군 수 안병옥 부군수 황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	풍동지구 배수개선사업
② 추진배경	상습 침수지역의 배수여건을 개선하여 농경지 침수 및 재해방지, 노동생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 전남 강진군 군동면 석교·풍동리 일원 ❍ 사 업 비 : 79억원(국비 79) ❍ 사업규모 : 70.6ha ❍ 사업내용 : 펌프게이트 1개소, 배수로 1,514m, 매립 7.4ha
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2020년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립 통보		‘17.03.13.	정석기 과 장 홍양식 팀 장 윤재필 주무관
❍ 풍동지구 배수개선사업 시행계획 승인		‘20.07.01.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 풍동지구 배수개선사업 실시설계 완료		‘20.09.24.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 풍동지구 배수개선사업 사업발주		‘20.10.7.	이승옥 군 수 이상심 부군수 백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	봉황지구 배수개선사업
② 추진배경	상습 침수지역의 배수여건을 개선하여 농경지 침수 및 재해방지, 노동생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 칠량면 봉황리, 장계리 ❍ 사 업 비 : 32억원(국비 32) ❍ 사업규모 : 54ha ❍ 사업내용 : 펌프게이트 1개소, 배수로 2,150m, 매립 4.9ha
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2020년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립 통보		‘16.04.26.	정석기 과 장 홍양식 팀 장 윤재필 주무관
❍ 봉황지구 배수개선사업 실시설계 완료		‘18.12.10.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관
❍ 봉황지구 배수개선사업 시행계획 승인		‘19.04.19.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관
❍ 봉황지구 배수개선사업 사업발주		‘19.05.16.	이승옥 군 수 이건섭 부군수 백남태 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관
❍ 봉황지구 배수개선사업 사업준공		‘20.12.22.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	만덕지구 대구획경지정리사업
② 추진배경	농로, 용ㆍ배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 도암면 만덕리, 강진읍 덕남리 ❍ 사 업 비 : 80.9억원(국비 1.5, 도비 60.6, 군비 18.8) ❍ 사업규모 : 270.9ha ❍ 사업내용 : 용수로 9,391m, 배수로 14,154m, 농로 5,512m, 정지 49필지
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립 통보		‘19.04.19.	황오연 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관
❍ 만덕지구 대구획경지정리사업 실시 설계 완료		‘19.11.07.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 박신남 주무관
❍ 만덕지구 대구획경지정리사업 시행 계획 승인		‘19.11.28.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 박신남 주무관
❍ 만덕지구 대구획경지정리사업 사업 발주		‘20.01.23.	이승옥 군 수 이건섭 부군수 백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 만덕지구 대구획경지정리사업 시행 계획 변경		‘21.06.24.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	덕서지구 대구획경지정리사업
② 추진배경	농로, 용ㆍ배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 도암면 덕서리 일원 ❍ 사 업 비 : 25.9억원(도비 22.3, 군비 3.6) ❍ 사업규모 : 101ha ❍ 사업내용 : 용수로 5,024m, 배수로 952m
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립 통보		‘21.06.18.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 덕서지구 대구획경지정리사업 시행 계획 승인		‘21.12.02.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 박신남 주무관
❍ 덕서지구 대구획경지정리사업 실시 설계 완료		‘21.12.09.	위길복 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 덕서지구 대구획경지정리사업 사업 발주		‘22.01.04.	이승옥 군 수 유미자 부군수 위길복 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도림지구 대구획경지정리사업
② 추진배경	농로, 용ㆍ배수로 등 기반정비가 취약한 평야부 우량농지를 대형농기계 작업이 가능하도록 재정비하여 농업생산성 향상을 통한 농가소득 증대 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 도암면 덕서리 일원 ❍ 사 업 비 : 15.1억원(도비 13, 군비 2.1) ❍ 사업규모 : 59ha ❍ 사업내용 : 용수로 2,266m, 배수로 1,529m, 용배수로 675m
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자	위길복 과 장(시설 5) 오광록 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2021년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립 통보		‘21.06.18.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 덕서지구 대구획경지정리사업 시행 계획 승인		‘21.12.02.	백남태 과 장 윤영운 팀 장 박신남 주무관
❍ 덕서지구 대구획경지정리사업 실시 설계 완료		‘21.12.09.	위길복 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관
❍ 덕서지구 대구획경지정리사업 사업 발주		‘22.01.04.	이승옥 군 수 유미자 부군수 위길복 과 장 윤영운 팀 장 오광록 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	계라제 수리시설 개보수사업
② 추진배경	노후저수지 개보수로 재해 사전예방 및 안정영농 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 도암면 계라리 199지내 ❍ 사 업 비 : 6억원(도비 4.8, 군비 1.2) ❍ 사업내용 - 제방 고르기 L=109m, H=0.5m, - 사석보강 L=102m, H=1.5m - 물넘이 L=12m, L=43.2m, B=2~12m - 그라우팅 45공
④ 사업부서	건설과		⑤ 담당자		위길복 과 장(시설5) 김법하 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 예정지조사 및 기본계획서 제출		‘20. 7.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 차혜지 주무관
○ 예산배정 및 교부결정 통보		‘21. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 실시설계용역 발주		‘21. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 의견 청취 공고		‘21. 7.		위길복 과 장 윤치성 팀 장 이재혁 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘21. 12.		위길복 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 편입토지 보상협의		‘22. 4.		위길복 과 장 윤영운 팀 장 김법하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	장등제 수리시설 개보수사업
② 추진배경	노후저수지 개보수로 재해 사전예방 및 안정영농 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 성전면 도림리 745-2 지내 ❍ 사 업 비 : 9억원(도비 7.2, 군비 1.8) ❍ 사업내용 - 덧쌓기 5,605㎡ - 사석설치 1,764㎡ - 그라우팅 98공 - 복통 개축 28m
④ 사업부서	건설과		⑤ 담당자		위길복 과 장(시설5) 김법하 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 예정지조사 및 기본계획서 제출		‘20. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 노태형 주무관
○ 예산배정 및 교부결정 통보		‘21. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 실시설계용역 발주		‘21. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 의견 청취 공고		‘21. 7.		위길복 과 장 윤치성 팀 장 이재혁 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘21. 12.		위길복 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 편입토지 보상협의		‘22. 4.		위길복 과 장 윤영운 팀 장 김법하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도림 1제 수리시설 개보수사업
② 추진배경	노후저수지 개보수로 재해 사전예방 및 안정영농 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 성전면 도림리 730-2 지내 ❍ 사 업 비 : 7억원(도비 5.6, 군비 1.4) ❍ 사업내용 - 사석보강 L=70m, H=9.4m - 여수로 L=75m - 그라우팅 68공 - 복통 L=34m, 사통 L=33m
④ 사업부서	건설과		⑤ 담당자		위길복 과 장(시설5) 김법하 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021년 ~ 2022년
<그간 주요 추진내용>
○ 예정지조사 및 기본계획서 제출		‘20. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 노태형 주무관
○ 예산배정 및 교부결정 통보		‘21. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 실시설계용역 발주		‘21. 2.		백남태 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 의견 청취 공고		‘21. 7.		위길복 과 장 윤치성 팀 장 이재혁 주무관
○ 보상계획 열람공고		‘21. 12.		위길복 과 장 윤영운 팀 장 이재혁 주무관
○ 편입토지 보상협의		‘22. 4.		위길복 과 장 윤영운 팀 장 김법하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군도3호선 확포장공사
② 추진배경	전남인재개발원 개원 및 가우도 일원 대규모 관광단지조성에 따른 기반시설 확충 필요
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2020. 12. ~ 2023. 12. ❍ 위 치 : 강진읍 학명리 ~ 도암면 만덕리 ❍ 사 업 비 : 145억 원(도비 30 군비 115) ❍ 사업내용 : L=6.647km, B=9.5m
④ 사업부서	건 설 과	⑤ 담당자		위길복 과 장(시설 5) 박신남 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간		2020. 12. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 교통안전진단 용역 완료		‘20.02.26.	백남태 과 장 김송길 팀 장 김재형 주무관
❍ 기본 및 실시설계 완료		‘20.10.30.	김영일 과 장 유효석 팀 장 박신남 주무관
❍ 총괄 및 1차분 발주		‘20.12.21.	이승옥 군 수 이건섭 부군수 김영일 과 장 유효석 팀 장 박신남 주무관
❍ 2차분 발주(L=2.0km)		‘21.06.03.	이승옥 군 수 이상심 부군수 박정식 과 장 유효석 팀 장 박신남 주무관
❍ 2차분(남포교~임천배수장) 공사 추진		‘21. 8. ~‘22. 8.

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	고성사 진입도로 위험사면 정비공사
② 추진배경	고성제 입구 주변도로 경사가 심하여 차량통행 및 이용에 따른 안전사고가 우려되어 개선 필요
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2022. 5. ~ 2022. 10. ❍ 위 치 : 강진읍 남성리 산18-1일원 ❍ 사 업 비 : 6억 원(도비 3 군비 3) ❍ 사업내용 : L=0.6km
④ 사업부서	건 설 과	⑤ 담당자		위길복 과 장(시설 5) 손은숙 주무관(시설 9)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간		2022. 5. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 실시설계 완료		‘22.04.15.	위길복 과 장 유효석 팀 장 손은숙 주무관
❍ 공사발주		‘22.04.29.	이승옥 군 수 유미자 부군수 위길복 과 장 유효석 팀 장 손은숙 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	국도23호선 남포교차로 정비사업
② 추진배경	전남인재개발원 개원 및 가우도 일원 대규모 관광단지조성에 따른 교차로 정비 필요
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2022. 4. ~ 2023. 12. ❍ 위 치 : 강진읍 남포리 36-11 ❍ 사 업 비 : 130억 원(특교 100%) ❍ 사업내용 : 교차로 정비 1식
④ 사업부서	건 설 과	⑤ 담당자		위길복 과 장(시설 5) 박신남 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간		2022. 4. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 도로교통공단 자문 의뢰		‘21.11.	박정식 과 장 유효석 팀 장 박신남 주무관
❍ 실시설계 용역 발주		‘22.03.08.	위길복 과 장 유효석 팀 장 박신남 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 제2일반산업단지 조성
② 추진배경	❍ 신규 산업단지 조성을 통한 지역성장산업 유치 활성화 ❍ 산업인프라 구축으로 일자리 창출 및 지역소득 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 성전면 명산리 산 138-2 일원 ❍ 사 업 비 : 약 15억 원 ❍ 주요내용 : 제2일반산업단지 계획수립 및 제영향평가 문화재조사
④ 사업부서	건설과	⑤ 담당자		위길복 과 장(시설5) 정성철 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5천만원 이상 용역사업	⑦ 사업기간		2020년 ~ 2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진제2일반산업단지 지정고시(국토부)		‘20.10.15.	백남태 과 장 박상함 팀 장 이재연 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 기본계획수립용역 및 제영향평가 시행계획 수립		‘20.11.19.	이상심 부군수 임채용 실 장 김국혼 과 장 김영실 팀 장 신기은 팀 장 박상함 팀 장 이재연 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 기본계획수립용역 사업수행능력평가서 제출		‘20.12.30.	백남태 과 장 박상함 팀 장 이재연 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 기본계획 수립용역 및 제영향평가 착수 (기본계획,환경,재해,문화재지표)		‘21.2.	이상심 부군수 김국혼 과 장 신기은 팀 장 위길복 과 장 박영천 팀 장 정성철 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 문화재 지표조사 완료		`21.7.22.	조달현 단 장 박영천 팀 장 이재연 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 문화재 시굴·표본조사용역 착수		`21.7.	이승옥 군수 이상심 부군수 김국혼 세무회계과장 조달현 단장 이상현 경리팀장 정성철 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 환경영향평가서(초안)제출		`21. 9.	조달현 단 장 박영천 팀 장 정성철 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 계획 승인신청서 제출		`21. 1.	위길복 과 장 박영천 팀 장 정성철 주무관
❍ 강진 제2일반산업단지 환경영향평가서(본안) 보완제출		`22. 4.	위길복 과 장 박영천 팀 장 정성철 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	농촌 신활력 플러스 사업
② 추진배경	❍ 농촌신활력사업을 통한 강진군 웰에이징 FUSO 산업 기반 구축 ❍ 웰에이징 FUSO 산업화·생활 문화화로 지역 활성화 및 주민 삶의 질 제고
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 전역 ❍ 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 12. ❍ 사 업 비 : 70억 원(국비 49, 군비 21) ❍ 사업내용 : 푸소센터 건립, 역량강화교육 및 컨설팅 등
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자		조달현 과 장(행정 5) 문주하 주무관(시설 8)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2019.1. ~ 2022.12.
<그간 주요 추진내용>
농촌신활력플러스사업 기본계획 승인			‘19. 04.		백남태 과 장 위길복 팀 장 백종혁 주무관
푸소센터 기본 및 실시계획 용역			‘20. 2. ~ ’21. 12.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관
역량강화 사업 추진			‘21. 2. ~ ’22. 12.		조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관
푸소센터 건립공사 추진 * 관급자재(철근) 납품 지연으로 공사 중지(‘22.5.)			‘21. 12. ~ ’22. 12.		조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 농촌중심지 활성화사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 읍 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 남성, 동성, 서성, 평동리 일원 ❍ 사 업 비 : 145억 원(균특 101.5, 군비 43.5) ❍ 사업규모 : 1,001ha ❍ 사업내용 : 공동체활성화센타, 공용주차장, 보행경관개선, 배후마을 거점지조성, 지역역량강화 등
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자	조달현 과 장(행정 5) 조성재 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019. 05. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 사업계획 자문 및 토지매입 등		‘19. 01. ~ 05.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
❍ 기본설계		‘19. 09. ~ ’20. 12.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
❍ 기본계획 승인 협의		‘21. 1. ~ ’21. 05.	백남태 과 장 윤재필 팀 장 조성재 주무관
❍ 지역역량강화 시행 및 세부설계 실시		‘21. 12. ~ ’22. 05.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 조성재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진만 생태공원 기반시설 조성사업
② 추진배경	다양한 생물과 넓은 갈대밭이 있는 강진만에 자연과 인간이 함께하는 생태공원을 조성하여 복합 생태 휴식형 공간 조성
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 남포리 일원 ❍ 사 업 비 : 40억 원(국비 40) ❍ 사업규모 : 2.59ha ❍ 사업내용 : 공원시설물 제작 및 설치, 주차장 조성 등
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자	조달현 과 장(행정 5) 문주하 주무관(시설 8)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019.01. ~ 2022.12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 지역개발계획 수립		‘18. 12.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
❍ 지역개발계획 경미한 변경(1차)		‘19. 5.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
❍ 지역개발계획 경미한 변경(2차)		‘19. 4 ~ ’21. 5.	백남태 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관
❍ 공원시설물 제작 설치 용역 중		‘19. 11. ~’22. 12.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관
❍ 지역개발계획 경미한 변경(3차)		‘21. 8. ~ ’22. 1.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관
❍ 지역개발 사업구역지정 및 시행자지정, 실시계획 승인 협의 ❍ 지역개발조정위원회 개최		‘22. 1. ~ ’22. 5.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	2022년 테마형 서비스거점 조성사업
② 추진배경	방치된 유휴시설의 정비 및 활용으로 주민의 삶의 질 향상과 생활서비스 공간 조성
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 서성리 60-5번지 일원 ❍ 사 업 비 : 5억 원(국비 3.5, 군비 1.5) ❍ 사업규모 : 330㎡ ❍ 사업내용 : 양곡창고 리모델링, 운영체제 역량강화 등
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자	조달현 과 장(행정 5) 조성재 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2022.01. ~ 2023.12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 시행계획 수립		‘22.1.~11.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 조성재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	다산 청렴수련원 주변 정비사업
② 추진배경	❍ 다산청렴수련원 신축과 사의재 관광지구 조성에 따른 기반시설 조성 ❍ 강진군 주요 자산인 다산 정약용 선생의 복합 교육·문화 공간 조성
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 동성리 일원 ❍ 사업기간 : 2018 ~ 2022 ❍ 사 업 비 : 53억 원(국비 53) ❍ 사업내용 : 공원 및 주차장 A=22,196㎡/도로 L=280m, B=8.0m
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자		조달현 과 장(행정 5) 문주하 주무관(시설 8)
⑥ 선정기준	5억 원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2018.1. ~ 2022.12.
<그간 주요 추진내용>
지역개발사업계획 변경 승인			‘19.05.13.		황오연 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관
지역개발사업구역 지정 고시			‘19.07.18.		백남태 과 장 위길복 팀 장 차혜지 주무관
기본 및 실시계획 용역 중			‘19. 08.~ ‘20. 06		백남태 과 장 위길복 팀 장 이태성 주무관
재해 및 환경영향평가 용역 중			‘19. 08.~ ‘22. 06		조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관
지역개발계획 중대한 변경 협의 중			‘22. 03.~		조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	영포지구 새뜰마을 사업
② 추진배경	취약지역 주민의 기본적인 생활수준 보장을 위해 안전·위생 등 긴요한 생활 인프라 확충 및 주거환경 개선, 주민역량강화 등 지원
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 군동면 호계리 일원 ❍ 사 업 비 : 22.41억 원(국비 16.03, 도비 1.67, 군비 3.91, 자부담 0.8) ❍ 사업내용 : 생활·위생·안전 등 기반시설 정비, 주택정비, 마을 환경개선, 주민역량강화 등
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자	조달현 과 장(행정 5) 문주하 주무관(시설 8)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2019.5. ~ 2022.12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획 수립		‘20. 05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 문주하 주무관
❍ 실시설계 용역		‘20. 03. ~ ’20. 11.	백남태 과 장 위길복 팀 장 문주하 주무관
❍ 공사 및 역량강화사업 추진		‘21. 1. ~ ’22. 12.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 문주하 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도암면 농촌중심지 활성화사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 도암면 항촌리 일원 ❍ 사 업 비 : 60억 원(균특 42, 군비 18) ❍ 사업규모 : 650ha ❍ 사업내용 : 커뮤니티센터, 주차장, 가로환경정비, 송림주변 정비, 지역 역량강화 등
④ 사업부서	농어촌개발과	⑤ 담당자	조달현 과 장(행정 5) 조성재 주무관(시설 7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업	⑦ 사업기간	2018.05. ~ 2022.06.
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본계획수립		‘18. 01. ~ ‘19. 04.	황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
❍ 세부시행계획 수립용역		‘19. 05. ~ ’20. 05.	백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
❍ 공사착수		‘20. 10. ~ ’22. 5.	백남태 과 장 윤재필 팀 장 조성재 주무관
❍ 1차분(복합활성화센터, 공동생활홈) 준공		‘22. 4. 30.	조달현 과 장 윤재필 팀 장 조성재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	칠량면 기초생활거점 육성사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 칠량면 영동리, 영복리, 봉황리 일원 ❍ 사 업 비 : 39억 원(국비 27, 군비 12) ❍ 사업규모 : 59.7㎢(중심지 9.0㎢, 배후마을 50.6㎢) ❍ 사업내용 : 칠량복지회관 리모델링, 거점마을 CCTV, 인도 설치, 가로경관 개선, 간판정비, 생활체육센터 경관정비, 호 암봉 산책로 정비, 지역역량강화
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업		⑦ 사업기간		2019. 1. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 예비계획 용역 완료		‘18.04.05.		정석기 과 장 윤영운 팀 장 박영천 주무관
○ 일반농산어촌개발사업 위수탁 협약 체결		‘19.1.28.		이승옥 군 수 이건섭 부군수 황오연 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 기본계획 승인		‘19.12.24.		백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 시행계획 승인		‘21.07.19.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 구대호 주무관
○ 시행계획 변경 승인		‘21.12.20.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 구대호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군동면 기초생활거점육성사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 군동면 라천리 일원 ❍ 사 업 비 : 40억 원(국비 28, 군비 12) ❍ 사업내용 : 복합문화센터 신축, 안전보행로, 역량강화 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업		⑦ 사업기간		2021. 1. ~ 2024. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 예비계획 용역 완료		‘20.05.06.		백남태 과 장 위길복 팀 장 전 혁 주무관
○ 기본계획수립용역 협상에 의한 계약 추진 계획		‘21.04.28.		이상심 부군수 백남태 과 장 윤재필 팀 장 조성재 주무관
○ 기본계획수립용역 협상에 의한 계약		‘21.06.28.		백남태 과 장 윤재필 팀 장 구대호 주무관
○ 추진위원회 회의 추진(1~3차)		‘21.07.23. ‘21.10.08. ‘21.12.23.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 구대호 주무관
○ 추진위원회 회의 추진(4차)		‘22.01.19.		조달현 과 장 이재형 팀 장 구대호 주무관
○ 편입부지 빈집 철거공사 추진		‘22.05.06.		조달현 과 장 이재형 팀 장 구대호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대구면 기초생활거점 육성사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 대구면 소재지 일원 ❍ 사 업 비 : 40억 원(국비 28, 군비 12) ❍ 사업규모 : 면소재지 내 거점지구 1개소(반경300m) ❍ 사업내용 : 복합문화센터 신축, 마을쉼터 조성, 지역역량강화
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업		⑦ 사업기간		2022. 1. ~ 2025. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본계획수립 용역 시행		‘22.04.21.		유미자 부군수 조달현 과 장 이재형 팀 장 구대호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	옴천면 기초생활거점 육성사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 면 중심지의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 옴천면 소재지 일원 ❍ 사 업 비 : 40억 원(국비 28, 군비 12) ❍ 사업규모 : 면소재지 내 거점지구 1개소(반경300m) ❍ 사업내용 : 복합문화센터 신축, 마을쉼터 조성, 지역역량강화
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억 원 이상의 건설사업		⑦ 사업기간		2022. 1. ~ 2025. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 기본계획수립 용역 시행		‘22.04.15.		유미자 부군수 조달현 과 장 이재형 팀 장 구대호 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신전권역단위 거점개발사업
② 추진배경	농산어촌지역 주민의 기초생활수준을 높이고 농산어촌의 어메니티 증진 및 계획적인 개발을 통하여 농산어촌의 인구 유지 및 지역별 특화 발전을 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 신전면 봉양리·노해리 일원 ❍ 사 업 비 : 46억 원(국비 32, 군비 14) ❍ 사업내용 : 신전복합문화센터신축, 신전목욕장리모델링, 국악연구소철거, 지역민교류광장조성, 중심가로조성, 지역 역량강화사업 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 구대호 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021. 1. ~ 2024. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 위수탁 협약 체결 및 기본계획수립 용역 착수		‘20.02.16.		전재영 과 장 이영일 팀 장 차형태 주무관
○ 기본계획 고시		‘21.08.19.		임창복 과 장 문진희 팀 장 차형태 주무관
○ 위치변경 전남도 협의		‘21.09.13.		임창복 과 장 문진희 팀 장 차형태 주무관
○ 세부계획 용역 착수		‘21.09.		임창복 과 장 문진희 팀 장 차형태 주무관
○ 지역역량강화 착수보고회		‘21.11.19.		임창복 과 장 문진희 팀 장 차형태 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	장동지구 새뜰마을사업
② 추진배경	비위생적이고 열악한 주거환경에 노출되어 주민들의 정주만족도 향상, 정주환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 및 귀농귀촌자의 지속유입도모 및 공동체 생활기반시설 정비 및 활동지원을 통한 마을의 가치 제고
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 영파리 장동마을 일원 ❍ 사 업 비 : 17억 원(국비 12.7, 도비 1.5, 군비 2.8) ❍ 사업내용 : 주택정비(슬레이트, 빈집정비, 집수리 등), 마을환경개선, 주민역량강화 사업 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021. 1. ~ 2024. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정 및 기본계획수립 용역 착수		‘21.08.23.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 황승재 주무관
○ 농림부, 전라남도 사전협의		‘22.04.07.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관
○ 기본계획 수립 고시		‘22.05.09.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	내동지구 새뜰마을사업
② 추진배경	비위생적이고 열악한 주거환경에 노출되어 주민들의 정주만족도 향상, 정주환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 및 귀농귀촌자의 지속유입도모 및 공동체 생활기반시설 정비 및 활동지원을 통한 마을의 가치 제고
③ 사업개요	❍ 위 치 : 작천면 내기리 내동마을 일원 ❍ 사 업 비 : 17.9억 원(국비 13.3, 도비 1.6, 군비 3.0) ❍ 사업내용 : 주택정비(슬레이트, 빈집정비, 집수리 등), 마을환경개선, 주민역량강화 사업 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021. 1. ~ 2024. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정 및 기본계획수립 용역 착수		‘21.08.23.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 황승재 주무관
○ 농림부, 전라남도 사전협의		‘22.04.07.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관
○ 기본계획 수립 고시		‘22.05.09.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	동삼인지구 새뜰마을사업
② 추진배경	비위생적이고 열악한 주거환경에 노출되어 주민들의 정주만족도 향상, 정주환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 및 귀농귀촌자의 지속유입도모 및 공동체 생활기반시설 정비 및 활동지원을 통한 마을의 가치 제고
③ 사업개요	❍ 위 치 : 병영 동삼인마을 일원 ❍ 사 업 비 : 22억 원(국비 18, 군비 3, 자부담 1) ❍ 사업내용 : 주택정비(슬레이트, 빈집정비, 집수리 등), 마을환경개선, 주민역량강화 사업 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2022. 5. ~ 2025. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정		‘22.03.14.		이준범 기획홍보실장 임진모 팀 장 김진솔 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송정지구 새뜰마을사업
② 추진배경	비위생적이고 열악한 주거환경에 노출되어 주민들의 정주만족도 향상, 정주환경 개선으로 주민 삶의 질 향상 및 귀농귀촌자의 지속유입도모 및 공동체 생활기반시설 정비 및 활동지원을 통한 마을의 가치 제고
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 송정마을 일원 ❍ 사 업 비 : 23억 원(국비 19, 군비 3, 자부담1) ❍ 사업내용 : 주택정비(슬레이트, 빈집정비, 집수리 등), 마을환경개선, 주민역량강화 사업 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2022. 5. ~ 2025. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 공모사업 선정		‘22.04.18.		이준범 기획홍보실장 임진모 팀 장 김진솔 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진읍 목리 마을만들기사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 목리마을 일원 ❍ 사 업 비 : 5억 원(군비) ❍ 사업내용 : 마을회관 리모델링 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2021. 1. ~ 2022. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 사업 대상지 선정 및 기본계획용역 착수		‘20.12.23.		백남태 과 장 위길복 팀 장 문주하 주무관
○ 기본계획 수립 및 실시설계용역 착수		‘21.07.28.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 황승재 주무관
○ 실시설계용역 완료		‘22.01.25.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관
○ 토목,건축,전기 공사 착공		‘22.02.16. ~‘22.6.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성전면 송학 마을만들기사업
② 추진배경	지역주민의 소득과 기초생활 수준을 높이고 마을의 계획적인 개발을 통하여 인구유지 및 지역별 특화 발전 도모
③ 사업개요	❍ 위 치 : 성전면 송학마을 일원 ❍ 사 업 비 : 5억 원(군비) ❍ 사업내용 : 마을회관 리모델링 등
④ 사업부서	농어촌개발과		⑤ 담당자		조달현 과 장(행정5) 황승재 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2022. 1. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
○ 대상지 평가 용역 착수		‘21.12.13.		위길복 과 장 윤재필 팀 장 황승재 주무관
○ 사업 대상지 선정		‘22.01.25.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관
○ 기본계획 수립 및 실시설계용역 착수		‘22.03.04.		조달현 과 장 이재형 팀 장 황승재 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진천 지방하천정비사업
② 추진배경	강진만으로 흐르는 강진천에 대한 생태기능회복 및 수질 개선으로 아름다운 친수 공간 조성에 따른 관광객 유치에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 서산리 ~ 남포리(하천정비 L=5.6㎞) ❍ 총사업비 : 241억 원(국비 35 도비 122 군비 84) ❍ 사업내용 : 친수공간조성, 생태하천조성, 자전거도로 조성 등
④ 사업부서	안전재난교통과		⑤ 담당자		박정식 과 장(행정5) 정성운 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간		2018. 10. ~ 2023. 12.
<그간 주요 추진내용>
❍ 강진천 지방하천 정비사업 사업확정 통보 (전남도 자연재난과)		‘18.01.29.		이화종 자연재난과장 임오중 하천시설팀장 임성수 주무관
❍ 강진천 지방하천 정비사업 보조금 신청 및 교부결정통보		‘18.02.08.		정석기 과 장 유효석 팀 장 김태웅 주무관
❍ 강진천 지방하천 정비사업 18년 예산확보(10억원)		‘18.03.29.		정석기 과 장 유효석 팀 장 김태웅 주무관
❍ 강진천 지방하천 정비사업 기본 및 실시설계 착공		‘18.10.15~ ‘20.06.30.		백남태 과 장 유효석 팀 장 김태웅 주무관
❍ 강진천 지방하천 정비사업 착공		‘20.12.24.		김영일 과 장 김송길 팀 장 이재형 주무관
❍ 강진천 지방하천 정비사업 추진 (1차분, 2차분 공사)		‘20.12.24.~ ‘22.12.31.~		박정식 과 장 홍양식 팀 장 정성운 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 동성 마을정비형 공공임대주택사업
② 추진배경	소규모 맞춤형 임대주택 건설로 우수한 주거환경을 제공하고 주택단지 조성을 통하여 안정적인 인구유입 기반 조성
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 강진읍 동성리 231-1번지 일원(부지면적: 13,831㎡) ❍ 사업규모 : 150세대(8층, 2동) / 연면적 8,005.69㎡(2,422평) ❍ 사 업 비 : 245억 원(LH 219억 원 / 강진군 26억 원)
④ 사업부서	민원봉사과	⑤ 담당자		김동남 과 장(시설5) 이세옥 주무관(시설7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2017년~2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 업무 협약 체결		‘17. 01.	이형동 과장 윤근식 팀장 조 훈 주무관
❍ 국토교통부 공공주택 사업 승인		‘17. 12.	윤상숙 과장 김선제 팀장 조 훈 주무관
❍ 보상계획 열람공고		‘18. 04.	윤상숙 과장 김선제 팀장 조 훈 주무관
❍ 구거이설 공사 실시		‘19. 05.	윤영갑 실장 김동남 팀장 이세옥 주무관
❍ 하수관로 이설공사 실시		‘19. 08.	허경자 과장 김동남 팀장 이세옥 주무관
❍ 공사착공 - 부지 정리 및 가설울타리 설치 등		‘21. 01.	조달현 과장 김동남 팀장 서성훈 주무관
❍ 입주자 모집 - 행복주택, 국민임대주택, 영구임대주택		‘21. 7. ~ 9.	김동남 과장 조 훈 팀장 서성훈 주무관
❍ 주변 배수로 설치 발주 및 계약의뢰		‘22. 5. 6.	김동남 과장 조 훈 팀장 이세옥 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진 호계 행복주택사업
② 추진배경	❍ 청년층 및 강진산업단지 근로자 등 주거약자를 위한 공공주택 확보하여 우수한 주거환경 조성 ❍ 노후된 군동 영포지구 도심재생 활성화
③ 사업개요	❍ 위 치 : 군동면 호계리 890 일원(부지면적 : 7,527㎡) ❍ 사업규모 : 100세대(11층, 2동) / 연면적 5,674㎡(1,716평) ❍ 사 업 비 : 190억 원(LH 171, 강진군 19)
④ 사업부서	민원봉사과	⑤ 담당자		김동남 과 장(시설5) 민명기 주무관(시설9)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2021년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 업무협약(MOU)체결 (전남도↔LH↔강진군)		‘20. 11. 26.	조달현 과장 김동남 팀장 민명기 주무관
❍ 국토부 행복주택 신규 후보지 선정		‘20. 12. 16.	조달현 과장 김동남 팀장 민명기 주무관
❍ 토지보상 추진		‘21. 3. ~ 6.	조달현 과장 김동남 팀장 민명기 주무관
❍ 협의취득 불가 토지 강제수용 요청 (강진군→LH)		‘21. 10. 15.	김동남 과장 조 훈 팀장 민명기 주무관
❍ 사업인정고시 주민의견 청취 공고		‘21. 11. 18. ~ 12. 2.	김동남 과장 조 훈 팀장 민명기 주무관
❍ 강진 호계 행복주택 업무협약 체결 (강진군↔LH)		‘22. 4. 5.	김동남 과장 조 훈 팀장 민명기 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송학지구 농어촌생활용수개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 강진읍 : 송정, 송현, 봉덕 - 성전면 : 송학, 금당, 당산, 명동 ❍ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘23년 ❍ 총사업비 : 60억 원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6) ❍ 사업내용 - 가압장 1개소 - 상수관로 L=26.8km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년~2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 실시설계 용역 완료		‘20.11.16.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 조성재
❍ 1차분 준공 : 관로(2.6km) 설치		‘21.03.19.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 윤유성
❍ 2차분 준공 : 관로(2.4km) 설치		‘22.01.17.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한
❍ 3차분 착수 : 관로(2.8km) 설치		‘22.02.21.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	도림지구 농어촌생활용수 개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 성전면 : 동령, 신기, 수암, 오산, 도림, 신예, 장등, 거목(8개마을) ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 58억 원(도비 40.6, 군비 17.4) ❍ 사업내용 - 가압장 1개소 - 상수관로 L=25.0km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 전라남도 계약심사완료		‘22.04.05.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	강진군 노후상수관망 정비사업
② 추진배경	노후 상수관망 정비를 통해 깨끗한 수돗물 공급
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진읍 외 2구역(군동, 병영) 일원 ❍ 사업기간 : ‘18년 ~ ‘22년 ❍ 총사업비 : 193억 원(국비 96.5, 군비 96.5) ❍ 사업내용 - 노후관망정비 L=22.8km - 상수도 급수구역 블록 및 유지관리시스템 구축 ※ 유수율 85% 달성
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2018년~2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 환경부 사전기술검토완료		‘20.04.18.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 조성재
❍ 기본 및 실시설계 완료		‘20.10.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 조성재
❍ 관망정비공사 시행		‘21.01.11.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	스마트 관망관리 인프라 구축사업
② 추진배경	상수관망에 대한 실질적이고 효율적 관리를 위해 수질·수량에 대한 통합 시스템 도입
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2022. 1. ~ 12.(1년) ❍ 사 업 비 : 25억 원(국비 70% / 군비 30%) ❍ 위 치 : 강진군 관내 ❍ 사업내용 : 스마트 관망 관리 시스템 구축 - 재염소투입설비, 정밀여과장치, 수질자동측정장치, 관세척 인프라, 실시간수압계, 소규모유량감시, 수돗물안심서비스 등
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자		박상함 소 장(시설5) 정세훈 주무관(공업8)
⑥ 선정기준	5억 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2022년 1월 ~ 12월
<그간 주요 추진내용>
○ 실시설계 용역 중		‘22.01.24	부군수 유미자 소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 정세훈

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	서성처리분구 하수관로 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 강진읍 일원 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 225억 원(국비 157, 지방비 68) ❍ 사업내용 - 오수관로 L=27.4km - 배수설비 830개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘21. 6. 2.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	풍동지구 농어촌생활용수개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 군동면 : 내동,안풍,안지,신기,퐁동,봉산,벽송,명암,양산 ❍ 사업기간 : ‘19년 ~ ‘22년 ❍ 총사업비 : 60억 원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6) ❍ 사업내용 - 상수관로 L=21.0km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2019년~2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 1차분 준공 : 관로(3.8km) 설치		‘20.12.16.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 조성재
❍ 2차분 준공 : 관로(6.7km) 설치		‘22.02.11.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한
❍ 3차분 착수 : 관로(6.7km) 설치		‘22.02.28.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼신지구 농어촌생활용수개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 군동면 : 연화,비자동,덕마,금사,월봉,왕마,평덕,관덕 - 칠량면 : 송산 ❍ 사업기간 : ‘21년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 58억 원(국비 40.6, 도비 5.22, 군비 12.18) ❍ 사업내용 - 배수지 1개소 - 가압장 1개소 - 상수관로 L=22.0km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2021년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 실시설계 용역 완료		‘22.03.27.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군동 비자지구 마을하수도 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 군동면, 칠량면 일원(7개마을) - 군동: 평덕, 관덕, 금사, 덕마, 비자동, 연화 / 칠량: 송산 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 125억원(국비 87, 지방비 38) ❍ 사업내용 - 하수처리시설 140톤/일 - 오수관로 L=11.3km - 배수설비 366개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자		박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘21. 5. 19.	소 장 정흥기 팀 장 김근영 주무관 정성운
❍ 공사(1차분) 착수		‘22. 1. 26.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	시목석천지구 마을하수도 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 군동면 시목마을/ 도암면 석천마을 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 30억 원(국비 21, 지방비 89) ❍ 사업내용 - 오수관로 L=3.231km - 배수설비 483개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘22. 6.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	삼흥지구 농어촌생활용수개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 칠량면 : 운산,연곡,영계,송촌,신흥,삼강,목암,율변,월송 ❍ 사업기간 : ‘21년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 58억 원(국비 40.6, 도비 5.22, 군비 12.18) ❍ 사업내용 - 가압장 1개소 - 상수관로 L=25.0km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2021년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 실시설계 용역 완료		‘22.03.27.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	계율지구 농어촌생활용수 개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 대구면 : 계치, 청룡, 난산, 용문, 항동 (5개마을) ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 16억 원(도비 11.2, 군비 4.8) ❍ 사업내용 - 가압장 1개소 - 상수관로 L=6.3km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 전라남도 계약심사완료		‘22.04.05.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	대구 저두지구 마을하수도 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 대구면 저두리 일원(3개마을) - 상저, 중저, 하저 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 70억원(국비 44, 지방비 26) ❍ 사업내용 - 하수처리시설 70톤/일 - 오수관로 L=4.3km - 배수설비 150개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘21. 5. 19.	소 장 정흥기 팀 장 김근영 주무관 정성운
❍ 공사(1차분) 착수		‘22. 4. 20.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마량 공공하수처리장 증설사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수처리장 증설
③ 사업개요	❍ 위 치 : 마량면 마량리 538 ❍ 사업기간 : ‘21년 ~ ‘23년 ❍ 총사업비 : 42억원(국비 29, 지방비 13) ❍ 사업내용 - 하수처리시설 270톤/일(증설)
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘21. 6. 2.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	마량 신마처리분구 하수관로 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 마량면 원포리 숙마마을 일원 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 18억 원(국비 13, 지방비 5) ❍ 사업내용 - 오수관로 L=2.2km - 배수설비 61개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘22. 6.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	계율지구 농어촌생활용수 개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 도암면 : 계라리, 지석리, 강정리 일원 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 32억 원(도비 22.4, 군비 9.6) ❍ 사업내용 - 상수관로 L=12.7km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 전라남도 계약심사완료		‘22.04.05.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	신전 송천·수양지구 마을하수도 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 신전 송천리, 도암 석문리 일원(3개마을) - 송천,수양(신전), 월하(도암) ❍ 사업기간 : ‘21년 ~ ‘23년 ❍ 총사업비 : 76억원(국비 53, 지방비 23) ❍ 사업내용 - 하수처리시설 20톤/일(증설) - 오수관로 L=8.4km - 배수설비 263개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘21. 6. 2.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	송월지구 농어촌생활용수 개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 성전면 : 월송, 신안, 대월, 제전, 월산, 처인(6개마을) ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 56.8억 원(도비 39.76, 군비 17.04) ❍ 사업내용 - 가압장 1개소 - 상수관로 L=24.0km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년~2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 전라남도 계약심사완료		‘22.04.05.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성전 월남·송학지구 마을하수도 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 성전면 월남리 월남마을, 송학리 송학마을 ❍ 사업기간 : ‘19년 ~ ‘22년 ❍ 총사업비 : 54억원(국비 22, 지방비 32) ❍ 사업내용 - 월남지구 : 처리시설 90㎥/일, 오수관로 5.9km, 가정관로 116개소 - 송학지구 : 오수관로 2.0km, 가정관로 79개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자		박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간		2019년∼2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 실시설계용역 완료		‘19. 4. 30.	소 장 김용은 팀 장 김송길 주무관 김우형
❍ 공사(1차분) 착수		‘20. 1. 10.	소 장 정석기 팀 장 김태웅 주무관 김재성
❍ 공사(2차분) 착수		‘21. 1. 22.	소 장 정흥기 팀 장 김근영 주무관 정성운
❍ 공사(3차분) 착수		‘22. 2. 21.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	성전 오산처리분구 하수관로 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 강진군 성전면 수양리 일원 ❍ 사업기간 : ‘22년 ~ ‘24년 ❍ 총사업비 : 56억 원(국비 39, 지방비 17) ❍ 사업내용 - 오수관로 L=7.22km - 배수설비 175개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2022년∼2024년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 추진		‘22. 6.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	작천지구 농어촌생활용수개발사업
② 추진배경	군민에게 맑고 깨끗한 생활용수를 안정적으로 공급함으로써 주민의 삶의 질 향상에 기여
③ 사업개요	❍ 위 치 - 작천면 : 내동,부와,죽산,용동,구상,척동,군자,행정,갈동 ❍ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘23년 ❍ 총사업비 : 60억 원(국비 42, 도비 5.4, 군비 12.6) ❍ 사업내용 - 상수관로 L=35.2km
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 김동한 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년~2023년
<그간 주요 추진내용>
❍ 실시설계 용역 완료		‘20.11.24.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 조성재
❍ 1차분 준공 : 관로(2.0km) 설치		‘21.03.10.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 윤유성
❍ 2차분 착수 : 관로(11.7km) 설치		‘21.03.10.	소 장 정흥기 팀 장 김재명 주무관 윤유성
❍ 3차분 착수 : 관로(3.8km) 설치		‘22.02.23.	소 장 박상함 팀 장 조병희 주무관 김동한

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	작천 구상지구 마을하수도 정비사업
② 추진배경	하수도정비 기본계획에 의거 취락지역의 생활환경 개선 및 공공수역인 남해안의 수질보전을 위한 공공하수도 보급률 증대
③ 사업개요	❍ 위 치 : 작천면 일원(9개마을) - 신기,내동,죽산,용동,용정,구상,군자,행정,갈동 ❍ 사업기간 : ‘20년 ~ ‘22년 ❍ 총사업비 : 107억원(국비 75, 지방비 32) ❍ 사업내용 - 하수처리시설 140톤/일 - 오수관로 L=13.88km - 배수설비 338개소
④ 사업부서	상하수도사업소	⑤ 담당자	박상함 소 장(시설5) 윤유성 주무관(시설8)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업	⑦ 사업기간	2020년∼2022년
<그간 주요 추진내용>
❍ 기본 및 실시설계 완료		‘19. 11. 20.	소 장 정석기 팀 장 김태웅 주무관 김우형
❍ 공사(1차분) 착수		‘20. 5. 27.	소 장 정흥기 팀 장 김태웅 담당자 김재성
❍ 공사(2차분) 착수		‘21. 1. 22.	소 장 정흥기 팀 장 김근영 주무관 정성운
❍ 공사(3차분) 착수		‘22. 2. 17.	소 장 박상함 팀 장 김재명 주무관 윤유성

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	양무정(국궁장) 개축사업
② 추진배경	- 기존 양무정 노후시설 개선 및 부족한 경기시설 확충 - 도 대회 및 전국대회 유치를 위한 인프라 조성
③ 사업개요	❍ 사업비 : 19.6억 원(국비 5.9, 지방비 13.7) ❍ 사업량 : 건축물 개축(400㎡)
④ 사업부서	스포츠산업단		⑤ 담당자	허진영 단 장(행정5) 노상법 주무관(공업7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2021 ~ 2022
<그간 주요 추진내용>
21년 체육진흥시설 지원사업 공모 확정		20.09.15.	임성수 단장 조 훈 시설관리팀장 전창주 주무관
양무정 신축(개축) 및 정비 실시설계 용역 준공		21.11.19	허진영 단장 고재갑 시설관리팀장 전창주 주무관
양무정 개축공사 계약의뢰		22.01.06.	허진영 단장 고재갑 시설관리팀장 노상법 주무관
양무정 개축공사 시행		22.02.09 ~22.7.	이승옥 군수 유미자 부군수 허진영 단장 고재갑 시설관리팀장 노상법 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	파크골프장 조성사업
② 추진배경	노인생활체육시설 조성으로 노인건강증진 및 삶의 질 향상
③ 사업개요	❍ 사업비 : 6억 원(국비 1.8, 지방비 4.2) ❍ 사업량 : 파크골프장 조성 1식(9홀 및 편의시설 포함)
④ 사업부서	스포츠산업단		⑤ 담당자	허진영 단 장(행정5) 노상법 주무관(공업7)
⑥ 선정기준	5억원 이상 건설사업		⑦ 사업기간	2021 ~ 2022
<그간 주요 추진내용>
2021년 체육진흥시설 지원사업 공모 확정		20.09.15.	임성수 단장 조 훈 시설관리팀장 전창주 주무관
강진 파크골프장 조성사업 실시설계 용역 발주		20.10.12.	임성수 단장 조 훈 시설관리팀장 전창주 주무관
강진 파크골프장 조성사업 실시설계 용역 일시정지		20.12.02.	이미라 단장 조 훈 시설관리팀장
강진 파크골프장 조성사업 실시설계 용역 일시정지		21.03.04.	이미라 단장 조 훈 시설관리팀장 전창주 주무관
강진 파크골프장 조성사업 실시설계 용역 일시정지 연장 요청 ※ 위치변경 논의 중		22.01.25	허진영 단장 고재갑 시설관리팀장 노상법 주무관

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	고려청자박물관 스마트박물관 조성사업
② 추진배경	박물관 전시 체험을 통해 실감체험, 학습 놀이와 휴식 제공 - 디지털뉴딜 사업
③ 사업개요	사업비 10억 원(국비 5, 군비 5) 실감콘텐츠 플레이존 구축
④ 사업부서	고려청자박물관		⑤ 담당자		마국진 관장(행정5) 김대원(학예연구사)
⑥ 선정기준	기타		⑦ 사업기간		2021 ~ 2022
<그간 주요 추진내용>
2021년 스마트박물관 조성 지원사업 공모 확정		‘21.02.05		마국진 관장 김신석 전시운영팀장 김대원 학예연구사
고려청자박물관 스마트박물관 구축 용역 계약체결		‘22.01.04		마국진 관장 김신석 전시운영팀장 김대원 학예연구사