단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범

* 이 사업은 중복ㆍ편중지원 금지사업에 해당되지 않습니다. - 친환경농업과-1294호(’13.1.21) *

□  사업목적

❍ 단동하우스 스마트팜 기술적용을 위해 자체개발 보급형 모델 보급

❍ 스마트팜 확산 및 기술지원 체계 개선을 위한 스마트팜 단지조성

□  추진방침

❍ 2023년 전라남도 도비 지원사업지침 최우선 준용

❍ 딸기 등 단동형 시설하우스 보유농가 중 재배희망농가 우선지원

※ 단동 우선 추진 원칙, 신청량 부족시 광폭단동, 3연동 이하 연동온실 추진 가능

※ 겨울 재배 작물(딸기 등) 스마트팜 도입에 적합한 작물 우선 선정

❍ 신품종 및 재배기술 투입이 용이하고 사업의욕이 높은 농가 선정

❍ ICT 재배기술에 대한 사전정보 숙지하고 견학 및 교육 등 유경험 농가 우선

❍ 양액시설, 환풍기, 보온커튼, 난방기 등이 설치되어 스마트팜 운영이 원활한 농가 선정

❍ 온습도 및 CO2 제어 등 정밀환경관리 가능한 업체 선정 추진(정산 지연업체 제외)

❍ 도․시군 현장지원센터로 환경정보 데이터 연계․공유 필수

❍ 사업 중도 포기 시 농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정에 따라 향후   사업지원 제한 및 불이익을 받을 수 있음

□  사업개요

❍ 사 업 량 : 2개소 내외

❍ 사업대상 : 단동시설하우스 0.2ha 내외 원예작물 재배 농업경영체 등

❍ 사업내용 : 기상장비(온습도,CO2 센서 등), 시설제어장치(제어박스 등),

통신장비(카메라, 모니터 등), 외부기상대 설치 등

❍ 사 업 비 : 50,000천 원(도비 10,000(20%), 군비 20,000(40%),

농협 10,000(20%), 자부담 10,000(20%))

- 개소당 3동 이하, 동당(660m2 내외) 8,000천 원 내외 기준

□  제출서류

기본	추가
사업신청서, 사업계획서, 개인정보 수집 활용 동의서	❍ 경영체등록확인서 또는 농지원부 1부. ❍ 토지대장 1부.(임차시 토지사용승낙서 첨부)

□ 세부추진계획

항 목	추진내용	시기
① 사업 신청 접수	❍ 사업 계획 홍보 및 접수 ❍ 사업 대상자 추천서 발급 : 지역농협 → 농가 ❍ 사업대상 신청을 받아 현지실태 조사 후 산학 협동심의회에서 확정	2월
② 대상자 선정	❍ 보조금 교부 신청 : 개별 농가 → 센터 ❍ 보조금 교부 결정 : 센터 → 농협군지부	2 ~ 3월
③ 사업 추진 및 기술 지원	❍ 시범사업추진 농가 사전교육 ❍ 사업 추진 상황 점검(계획, 중간, 완료) ❍ 스마트팜 현장 기술지원	3 ~ 11월
④ 준공 정산 검사	❍ 사업실적보고서 접수 : 개별 농가 → 센터 ❍ 준공(정산) 검사 및 보조금 집행 : 센터 → 농협군지부	11월 중순
⑤ 사업평가	❍ 사업 결과 평가 ❍ 사업비 집행 : 농협군지부 → 설치업체 ❍ 도ㆍ시군 현장지원센터로 환경정보 데이터 연계ㆍ공유(필수)	12월 하순

□ 사업 순기표

월 별	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
사업 신청 접수
실태조사 및 대상농가 선정
보조금 교부결정
사업 추진 및 준공 검사
사업 평가

□ 기대효과

❍ 품목별 빅데이터를 활용한 체계적인 환경제어로 농업기술 경쟁력 확보

❍ 단동하우스 ICT 융복합 기술투입에 의한 단계적 규모화·정밀화 실현

단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범사업 신청서

신 청 자 (대표)	주소 (새주소)				전화 번호		☎ : H.P :
	성명
사업장 위치	‣ 강진군 읍.면 리 번지(지목: ) ‣ 면 적 : ㎡ ‣ 토지소유자 :
재배작목명
신청내역	신 청 량 (㎡)
	사 업 비(천원)
	계(100%)		도비(20%)	군비(40%)		농협(20%)		자담(20%)

위와 같이 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범사업 신청서를 제출합니다.

붙임 : 1. 시범사업 계획서 1부.

2. 개인정보활용동의서 1부

3. 농지원부 또는 경영체 등록증 사본 1부.

4. 토지대장 1부.(임차시 토지사용승낙서 제출)

2023년    월    일

신청자(대표)  주 소 :

성 명 :                  (인)

강진군농업기술센터 소장 귀 하

단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범 계획서

1. 사  업  명 : 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범사업

2. 세부사업명 : 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범사업

3. 사 업 내 용 :

4. 사업장위치(주소, 성명) :

5. 사업수행계획 (월별 추진계획)

❍

❍

❍

6. 사업비 산출기초

항 목 별	사 업 비(천원)			산출기초
	계	보조금(80%)	자담(20%)

7. 사업비의 자부담 조달방법

❍ 부 담 금 액 :

❍ 조 달 방 법 :

8. 사업추진방법 :

9. 사업효과

❍

❍

2023년 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범

개인정보 활용 동의서

본인은 <정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률> 제22조(개인정보의 수집‧이용 동의 등) 및 제24조의 2(개인정보의 제공 동의 등), <개인정보 보호법> 제15조(개인정보의 수집‧이용), 제17조(개인정보의 제공)에 따라 본인의 개인정보를 농촌진흥청 및 농업기술원, 농업기술센터에서 수집‧활용하는데 동의합니다.

2023년   월    일

주 소 :

성 명 :                        (서명, 날인)

○ 개인정보 수집목적 : 본인확인절차, 정책정보 등 행정서비스 제공, 업무와 관련된  통계자료 작성, 교육 및 컨설팅 등 경영체 관리, 사업 사후관리  및 평가

○ 개인정보 수집항목 : 성명, 성별, 주소(이메일, 자택 ‧ 사업장), 연락처, 생년월일,                      사업수혜내역

○ 개인정보 보유 및 이용기간 : 본인탈퇴 또는 사업목적이 달성된 이후 파기

○ 개인정보를 제공받는 대상 : 국가 및 지방행정기관

○ 귀하께서는 개인정보 제공 및 활용에 거부할 권리가 있음을 알려드리며, 거부하실 경우 신청서 접수가 불가능함을 알려드립니다.

강진군수(농업기술센터소장) 귀하

□ 추천서 양식

『단동하우스 보급형 스마트팜』

대상자 추천서

수신 : OO시군농업기술센터소장          발신:  OO농업협동조합장

1. 추천인

성 명		생년월일
휴대폰		번호
주 소

2. 추천사유

00농협은 상기인을 『2023년 단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 시범사업』지원대상자로 위와 같이 추천합니다.

2023.   .   .

○○농업협동조합장(인)

단동하우스 보급형 스마트팜 단지조성 신청농가 현지 실태조사표

❍ 신청자  주소 :

성명 :

❍ 현지조사 내용

항 목	배 점 기 준	배점	득점	조사결과
농가여건 (40점)	❍ 단동하우스 운영 경력 - 경력 5년 이상 20 - 1년 이상 5년 미만 15 - 1년 미만 10	20
	❍ 사전 정보 습득 정도 - 스마트팜 전반 이해 높음 10 - 이해도 중간 5 - 부족 0	10
	❍ 재배 작물 종류 - 동계작물(딸기 등) 재배 10 - 기타 0	10
포장여건 (50점)	❍ 시설내 인터넷 활용 여부 및 모니터링 시스템 설치 여건 - 양호 20 - 보통 15 - 불량 10	20
	❍ 환경관리 시설 설치 수준 - 가온 및 보온(커튼) 등 높음 20 - 보통 10 - 불량 0	20
	❍ 시범효과 전파 가능성 (접근성 및 집단화 평가 등) - 높음 10 - 보통 5 - 낮음 0	10
기 타 (10점)	○ 정부자금 수혜여부 - 수혜없음 10 - 최근 5년내 수혜 7 - 최근 3년내 수혜 5 - 2022년 수혜 0	10
계 (100점)

현지조사일 : 2023년    월    일

현지조사자 :  직               성명             (인)

현지조사자 :  직               성명             (인)