【 붙임5 】

칠량면사무소 신축사업

- 단계 : 기본계획 -

회계과, 김현, 061-430-3542

일반 현황	소 재 지	강진군 칠량면 영동리 1072-7번지(칠량로 67)
	인구 수	2,165명(2023.03.31.기준)
	공무원 수	18명/19명	현원/정원
	재정자립도	7.6%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도				부지면적			기준면적			건물연면적		층수 (지하/지상)				비고
	합계	1985				1,862㎡						944㎡		2층
	본청	1985				1,862㎡						944㎡		2층
	의회
	기타
	청사신축 필요성			준공 후 38년 경과한 노후 청사 신축을 통한 주민불편 해소 및 업무효율 증대
	사업기간			2023. 1. ~ 2025. 6.(2.5년)
	사업수행방식			설계･시공 분리 : 입찰(적격심사 낙찰제)
	추정(예정)가격			4,080,000,000원				계약금액			3,539,196,000원				낙찰율		86.745 %
	청사신축 계획(안)
	용도		준공연도		부지면적		기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)			비고
	합계				3,114㎡					1,234㎡			2층
	본청		2025		3,114㎡					1,234㎡			2층
	의회
	기타

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비	시도비		시군구비	지방채
	합계	4,800
	당해연도(H)	4,800					4,800
	H+1
	H+2
	H+3 이후
	총사업비(4,794만원)
	1) 토지매입비		220			비고
	2) 설계비		223			기투자(총사업비 제외)
	3) 감리비		43
	4) 공사비		4,080
	5) 각종수수료		85
	6) 기타부대비		363

향후 계획 및 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2222. 12.	확정	자체
	타당성 조사	해당없음
	공유재산관리계획	2023. 2.	의결	강진군의회
	투융자심사	2023. 4.		도
	설계	2023. 8.	착수	자체
	착공	2024. 7.	착공	자체
	준공	2025. 6.	준공	자체